투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	도로점용공사장 교통소통대책 공사기간 변경제출(북악터널내부보수보강공사)

1. 교통운영과-7832 (2014.4.25.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하고 있는 북악터널내부 보수·보강공사(도로점용공사장)에 대하여 아래와 같이 교통소통대책 점용기간 변경사항을 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내역 (사유 : 장기계속사업 시행)

공 사 명	시행청(시행부서)	점용기간		비고
		당 초	변 경
북악터널 내부 보수·보강공사	북부도로사업소 (시설보수과)	2013. 09. 04∼ 2014. 02. 28	2013. 09. 04∼ 2015. 12. 20

첨  부 : 예정공정표 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김발현		시설보수과장	05/01 정재현
협조자
시행	시설보수과-3162	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5460	/전송	945-5073	/	kbh04099@seoul.go.kr	/	대시민공개