문서번호	설비부-4719
결재일자	2014.5.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김은덕		권오식	05/01 박기형
협조

『 장충체육관 리모델링 전기공사 』

조명시설 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『 장충체육관 리모델링 전기공사 』

조명시설 변경 검토보고

장충체육관 리모델링사업 준공 후 운영시 에너지절감 방안으로 조명시설을 LED로 변경한 사항에 대한 검토내용임

1		기본개요

□ 관련근거 : 행정1부시장 방침 제376호(2013.9.9.)

○ 장충체육관 리모델링 사업계획 변경추진

□ 추진현황

○ 2013. 09. 09 : 장충체육관 리모델링 사업계획 변경 통보(체육진흥과)

- 일반조명 100% LED화(120백만원 증액)

○ 2013. 09. 23 : 사업계획 변경에 따른 설비분야 업무지시

○ 2013. 12. 17 : 야간경관조명 ‘빛공해 방지위원회’ 심의

○ 2014. 04. 25 : 조명기구 구매를 위한 설계서 제출 업무지시

○ 2014. 04. 29 : 감리단 설계도서 검토 제출

2		검토내용

□ 주요 변경내용

구 분	당 초	변 경
일반조명	형광등(94%), 메탈등(11%), LED(5%)	LED(100%)
경관조명(조경)	메탈등(18%), LED(82%)	LED(100%)

□ 구매방법 및 금액 변경

구 분	당 초		변 경		비 고
	구매방법	금액(천원)	구배방법	금액(천원)
일반조명	관급	101,633	관급	160,205
			사급	43,778
경관조명 (조경)	관급	20,356	관급	9,006	기 구매한 조명기구 제외
합 계		121,989		212,989	증)91,000천원

※ 조명기구 세부적인 현황은 붙임1 “조명기구 세부적인 변경 현황” 참조

□ 사급 대상

구 분	수량	금액(천원)	비 고
LED 50W (밧데리 내장형)	6개	2,178	서울 메트로구간 설치
Lighting Track	102.5m	16,400	전시 조명용 배선기구
LED18W Spot	70개	25,200	전시 조명용
합 계		43,778

□ 감리단 검토의견

○ 장충체육관 리모델링 사업계획 변경에 의거 경기장 조명을 제외한 모든 조명시설을 100% LED로 반영한 사항으로서, 실별 조명기구 배치 및 수량이 적정하며

○ 서울메트로 인계부분 및 트랙조명은 현장 여건을 반영 시공되어야 함을 감안 사급으로 구매 시공하고, 그 외 조명기구는 관급으로 구매 추진함이 타당하다고 봄

3		조치계획

□ 조치의견

○ 감리단 검토 의견이 타당한 것으로 판단되는바, 기능성 조명기구는 사급으로 반영 시공토록하고

○ 사급대상외 모든 조명기구는 관급으로 구매하여 도급자가 시공하도록 조치

□ 행정사항

○ 사급대상 조명기구는 우선 현장여건에 맞게 구매하여 시공하되 향후 설계변경시 반영하도록 감리단에 업무지시

○ 관급대상 조명기구는 5월중 구매

붙임 : 1. 조명기구 세부적인 변경 현황 1부

2. 책임감리단 검토 보고서 1부.  끝.