문서번호	토목부-8508
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
오열상		김영수	05/02 노우성
협조
	주무관		임경태

감리원 배치계획 변경에 따른 감리비 조정

(용마터널 민간투자사업 건설공사 전면책임감리용역)

2014. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

감리원 배치계획 변경에 따른 감리비 조정

공사장 안전사고 재발방지 개선대책 일환으로 추가 투입 감리원에 대한 감리비가 본부 포괄예산으로 배정되었으나, 동 사업이 민자사업으로 집행이 어려워 본부 내 타 현장에 활용코자 보고하는 사항임.

용역개요

○ 용 역 명 : 용마터널 민간투자사업 건설공사 전면책임감리용역

○ 용역규모 : 폭 4차로, 연장 2,565m

○ 용역기간 : 2009.11.21 ~ 2014.11.20

○ 계약금액 : 3,098백만원(용마터널(주)↔감리전문회사 간 계약)

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소외 1

※ 공정현황 : 계획 94%, 실적 90%(대비 95%)

감리 투입현황

공사비 (억원)	감리비 (억원)	감리비/공사비 (%)	감리원 투입현황				비고
			계	수석감리사	감리사	감리사보
1,172	31	2.65	10	1	2	7

감리원 추가투입 경위

○ ‘13.10.23. : 전담감리원 증원 배치계획(본부장 방침, 토목부-19588)

- 추진근거 : 공사장 안전사고 재발방지대책, 행정제2부시장 방침 제318호(‘13.10.17.)

○ ‘13.11. 7. : 안전감리원 추가 투입(토목부-20683)

○ ‘14. 1.14. : 전문감리원 증원배치에 따른 감리비 책정(90백만원)

- 전문감리원 증원배치에 따른 ‘14년 예산집행계획 보고(본부장 방침, 토목부-768)

○ ‘14. 2.18 : 안전관리 분야 기술지원감리원 투입(수석감리사, 건설안전기술사)

- 터털발파 등  화약류 관리분야 공종 완료에 따른 → 안전관리분야로의 변경 투입

○ ‘14. 4.15 : 감리원 배치계획 조정 승인(토목부-7170)

- 추가 배치된 안전감리원 철수(안전관리 강화를 위해 → 안전관리 전문업체에 위탁에 따른 조정)

- 현장 여건에 의한 건축, 조경 분야 투입기간 단축 조정

조치계획

○ 기 추가 투입기간의 감리비는 현장 실정을 감안한 분야별(건축,조경 등)

감리 투입기간 조정을 통해 별도 재정지원 없이 민자시업자 부담으로 시행.

- 추가 안전감리 투입기간(감리사보) : ‘13.11.11~’14.3.31(4.7개월)

○ 포괄예산으로 편성된  감리비는(90백만원) 민자사업 특성상 집행이 곤란한

실정으로 타 현장에 활용토록 조치.

붙 임 : 감리투입계획 1부.  끝.