문서번호	자원순환과-7804
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	05/26 최홍식
협조

마포자원회수시설 철재류 도장공사 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.23.(금)

자원순환과

마포자원회수시설 도장공사 계획보고

마포자원회수시설 소각설비의 안전관리를 위해 철재류의 부식 또는 벗겨진 부위를 재도장하여 설비의 수명연장과  내화기준에 충족하기 위해 도장공사를 실시코자 보고드림

□ 근거

○ 마포자원회수시설 위․수탁운영 협약서 제10조(운영비용 집행) 제4호

- 단일사업으로 추정가격 3천만원 초과 용역 및 공사, 물품구매(2천만원)

○ 마포자원회수시설 철재류 도장 공사 계획서 제출(마자운영 14-186, 2014.5.21.)

○ 산업안전기준에 관한 규칙 제270조 내화기준 충족

□ 작업범위

○ 작업대상 : 공장동 철골 및 배관(지지대 포함)

구 분	작업장소	작업내용	비 고
배관도장	LNG, 약품, 경유, 압축공기, 대형주차장 스프링클러 등	부식 및 손상부위 재도장 물질명, 흐름방향, 배관색상표식 등 표기	공정안전관리(PSM) 지적사항
배관 지지대도장	LNG 배관	내화도장(2시간)	공정안전관리(PSM) 지적사항

○ 작업물량

구 분	작업장소	작업물량(㎡)	비고
조합페인트	LNG, 약품, 경유, 압축공기, 대형주차장 스프링클러 등	664	공정안전관리(PSM) 지적사항
내화페인트	LNG 배관	654	공정안전관리(PSM) 지적사항

□ 운영사 승인 요청 내용

○ 사 업 명 : 마포자원회수시설 철재류 도장공사

○ 공사개요 : 자원회수시설 공장동에 설치된 배관 및 지지대 도색

- 조합폐인트 도색 : LNG, 압축공기, 암모니아수, 경유, 소방 배관

- 내화 및 조합페인트 도색 : LNG 배관 지지대

○ 공사기간 : 계약일로부터 90일.

○ 소요예산 : 53,831천원

○ 공사내용

- 철재류 바탕만들기 :664㎡

- 철재류 녹막이 도장 : 664㎡

- 철재류 조합페인트 도장 : 664㎡

- 내화페인트 도장 : 654㎡

□ 자체심사 결과

○ 심사 결과 : 감1,658.8천원(3.1%)

(단위 : 원)

사업명	요청금액	심사금액	절감액	조정율	비고
철재류 도장공사	53,831,800	52,173,000	1,658,800	3.1%	승 인
총 계	53,831,800	52,173,000	1,658,800	3.1%

□ 자체심사 주요내용

○ 내화페인트 물량 조정

- 제조사가 제시한 이론소요량과 실제소요량을 참조하여 조정

․ 내화페인트 일위대가 조정 : 7.21ℓ → 6.49ℓ로 조정

※ 조정내용 : (5.77ℓ+7.21ℓ)/2 = 6.49ℓ

□ 추진 계획

○ 사 업 명 : 마포자원회수시설 철재류 도장공사

○ 소요예산 : 52,173천원

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(G2B),

○ 입찰참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 도장공사업면허 등록자.

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항 제2호에 의한 동일종류의 공사실적으로 제한

- 기타 운영사에서 정한 입찰참가 자격

○ 추진일정

- 2014. 5월 : 공사 발주

- 2014. 5월 ~ 2014.8월 : 공사시행(부분준공 가능)

□ 행정사항

○ 운영사 승인통보

붙임 : 자체심사 내역 각  1부. 끝.