문서번호	조경과-7120
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
박찬홍	한정훈	05/27 이원영

2014년도 에코스쿨 조성사업(장안중학교) 사업계획 변경요청에 따른 검토 보고

2014. 5.

푸른도시국

(조 경 과)

2014년도 에코스쿨 조성사업(장안중학교)

사업계획 변경요청에 따른 검토 보고

2014년 에코스쿨 조성사업으로 중랑구에서 추진하고 있는 장안중학교 에코스쿨 조성사업 사업계획 변경 승인 요청이 있어 검토 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		사 업 개 요

대    상 : 중랑구 장안중학교 등 19개교

규    모 : 17,494㎡

사업기간 : 2014.1. ~ 2014.12.

사업내용 : 학교내 옥상 녹화 · 텃밭조성 및 벽면녹화 등

사 업 비 : 2,118백만원

Ⅱ		에코스쿨 사업계획 변경 요청 개요

대    상 : 중랑구 장안중학교

내    용 : 옥상녹화 및 벽면녹화

예산현황 : 60,000천 원

(단위: 천원)

예산	배정액	집행액	배정잔액	비 고
60,000	9,048	60,000	50,952	- 구조안전진단 설계용역

변경요청 내용

- 요청기관 : 중랑구청(공원녹지과)

- 변경사유 : 당초 계획된 옥상녹화면적에서 텃밭조성 및 녹화면적 증대를 요청하는 학교측 요구사항을 수용

- 변경내용 : 녹화면적 증대에 따른 사업비 증가

구분	당 초	변 경	증 가	비 고
녹화면적	150㎡	231㎡	81㎡	-
사 업 비	60,000천원	90,000천원	30,000천원

Ⅲ		검 토 의 견

중랑구에서는 1차 설계심의 결과 반영으로 당초 옥상에 텃밭만 조성하는 방안에서 텃밭과 옥상녹화를 조성하는 방안으로 계획을 변경하였으나 녹화면적 증대로 인해 사업비가 부족한 실정임.

우리시 옥상녹화 기준에 부합하는 제대로 된 옥상녹화를 위해 부족한 예산을 2014 에코스쿨 조성사업비 유보액(40백만원) 중 30백만원을 활용하여 장안중학교 에코스쿨 조성사업이 원활하게 추진될 수 있도록 조치코자 함.

Ⅳ		향 후 계 획

중랑구(공원녹지과)에 에코스쿨 조성사업(장안중학교) 사업계획 변경 승인 사항을 통보코자 함.  끝.