문서번호	물재생시설과-7641
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	06/16 김병위
협조

「제2처리장 자동제어컴퓨터 교체」

시설비 집행 계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

도시안전실

(물재생시설과)

서남물재생센터 제2처리장

자동제어컴퓨터 교체 검토 보고

(주)서남환경에서 승인 요청한 제2처리장 자동제어 컴퓨터 교체사업에 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 요청내용

○ 사 업 명 : 제2처리장 자동제어 컴퓨터 교체사업

○ 사 업 비 : 127,880천원(시설비)

○ 계약방법 : 제한입찰(실적.지역)

○ 사업기간 : 계약일로부터 70일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
제2처리장 자동제어 컴퓨터 교체사업	○ 제2처리장 자동제어컴퓨터 및 SW 업그레이드 . HW 교체 7식 . SW 업그레이드 15식 . DB SERVE 1식	○ 자동제어설비중 노후된 자동제어 컴퓨터를 적기에 교체하여 시스템의 안정성과 신뢰도 향상	제한 입찰

□ 검토내용

○ 사업계획 반영여부 : 단위사업

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ 노후화 및 단종된 컴퓨터와 WINDOWS XP 서비스 중단으로 보안   업그레이드 불가한 컴퓨터의 운영체제 변경 필요

‣ 주요정보통신기반시설 지정에 따른 보안강화 조치로 외부와 차단된   DB SERVER 신설 필요

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                               (단위 :천원)

예산액	요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비 고
161,000	127,880	119,679	△8,201	△6.4%	계약심사

‣ 주요 심사내용(계약심사과)

- HARDWARE 비용 조정

. 중앙감시용컴퓨터        7,996,000원 → 7,596,000원

. DB SERVER          14,400,000원 → 13,680,000원

- SOFTWARE 비용 조정

. HMI SERVER 프로그램  6,384,000원  → 6,064,000원

. DB SERVER 백신          680,000원  → 646,000원

○ 계약방법의 적정성 : 제한입찰(실적,지역)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령               제20조제1항 제5호, 제6호

‣ 서남센터 하수처리 자동제어용 컴퓨터 교체, 운영SW 업그레이드,        자동운전에 필요한 모든 데이터 이전 및 최적화하는 사업으로            하수처리시설을 무중단 운영하면서 최단기간내 사업수행을 완료코자           하수처리 HW/SW 개발 및 납품실적이 있는 전문업체로 하여금          사업을 시행함이 적정함.

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 하수처리시설을 무중단 운영할 수 있도록 안전사고 예방대책 및 공정    계획을 수립 안전조치 후 작업하고, 지침서 내용이 충족되면 준공토록    집행 계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝