투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울시립 여성보호센터 수전용량 증설공사 계약변경 의뢰(설계변경)

우리 본부에서 시행 중인 “서울시립 여성보호센터 수전용량 증설공사”에 대하여   준공을 위한 설계변경이 있어 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울시립 여성보호센터 수전용량 증설공사

나. 계약금액 : ￦112,899,807원

다. 공사기간 : `13.12.16 ~ `14.6.30

라. 계 약 자 : 메가파워넷(주)

마. 계약변경 내용                                  (단위 : 원)

구 분	계약 금액		증·감	변경 사유
	당 초	변 경
도급액	￦112,899,807	￦109,500,000	감)3,309,807	시공상세도 작성비 정산

바. 예산과목 : 양성평등 및 여성복지증진, 보호필요여성의 복지향상,

노숙인시설 기능보강, 시설비.

붙임  1) 설계변경 보고서 1부.

2) 변경 내역서 1부.

3) 합의서 1부.

4) 원가계산서 제비율 검증서 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	이기철		녹색성장과장	김창균		설비부장	06/26 박기형
협조자
시행	설비부-6866	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8636	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개