문서번호	설비부-6945
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김홍석	이흥복	06/27 박기형

「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기·통신공사」

관급자재 수량변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기·통신공사」

관급자재 수량변경 검토보고

우리본부에서 추진중인「서부트럭터미널앞 지하차도 전기·통신공사」와 관련 책임감리원으로부터 관급자재 수량변경 구매요청이 있어 아래와 같이 검토 보고함.

Ⅰ		검토 근거

서지(감)제14-281호「관급자재(가로등 외) 추가 발주 요청」

서지(감)제14-280호「관급자재(CCTV) 추가 발주 요청」

Ⅱ		공사 개요

공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 전기·통신공사

공사기간 : 총차 2010. 11. 29 ~ 2014. 07. 20

감 리 사 :  (주)동일기술공사 외 1개사

관급자재 현황 (전기·통신분야)

품 명		계 약 액	계 약 자	납품기한	비고
자동제어설비		272,000,000	㈜신아시스템	2014.07.20
CCTV설비		174,872,000	그린아이티코리아	2014.07.20
가로등	등주 및 등기구	107,680,000	에이컴조명(주)	2014.07.20
	램프 및 안정기	14,283,600	우성전기(주)	2014.07.20

Ⅲ		관급자재 변경 주요내용

○ 자동제어설비 : 화곡터널관리소 및 강서도로사업소에 원격감시

제어설비 추가설치(사업소 요청)

○ CCTV설비 : 전기실 및 제어실에 감시카메라 추가설치(사업소 요청)

○ 가로등 : 시점부 이면도로(차도)가 민원에 의해 존치됨에 따라

보행등 24개 신설

Ⅳ		설계변경 세부내역

구 분		단위	수량		변경내용	증.감 (천원)
			당초	변경
원격감시제어설비 (자동제어설비)		set	1	3	화곡터널관리소 및 강서도로사업소에 2set 추가설치(사업소 요구)	증26,000
감시카메라 (CCTV설비)		대	14	16	전기실 및 제어실에 감시카메라 2대 추가설치(사업소 요구)	증 5,827
가로등	차도등	본	96	90	-종점부 토목 미시공으로 9본 삭제 -시점부 2본 및 한성교회앞 1본 현장여건에 따라 추가 설치	감 9,803
	보행등	개	0	24	시점부 이면도로가 존치됨에 따라 22등 신설 한성교회앞에 보행자 안전을 위해 2등 신설	증11,160

Ⅳ		내역 변경내용

(단위 : 천원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증․감	비 고
자동제어	272,000	298,000	증26,000
CCTV	174,872	180,699	증 5,827
가로등	121,963	123,320	증 1,357

Ⅴ		조치 의견

상기 관급자재의 변경사항에 대하여 책임감리원의 검토결과가

적정하다고 사료되어, 조달청 및 건설총괄부에 재계약 의뢰하여 추가구매코자 함.

따로붙임 : 1. 감리단 관급자재 추가발주 요청서 1부.

2. 관급자재(가로등) 변경 세부내역서 1부. 끝.