투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 의뢰(서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기·통신공사)

우리 본부에서 시행 중인 「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기 ․ 통신공사」용 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 연기요청 현황

공사구분	품 명	계약번호	계약금액	계 약 자	납품기한
		납품요구번호			당 초	변 경
전기공사	가로등기구	00128129901	33,370,000	에이컴 조명(주)	‘14.07.20	‘14.08.29
		121227006001
	가로등주	00115119703	51,070,000	에이컴 조명(주)	‘14.07.20	‘14.08.29
		121215784201
	자동제어장치	121*******01	298,000,000	(주)신아 시스템	‘14.07.20	‘14.08.29
		조달총액계약
통신공사	CCTV설비	121*******01	174,872,000	그린아이티코리아	‘14.07.20	‘14.08.29
		조달총액계약

2. 연기사유 : 자재 사용 시기 미도래

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로 붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 합의서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	김홍석		시책사업과장	이흥복		설비부장	07/16 박기형
협조자	경리과장	최영미
시행	설비부-7743	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관 2동 2층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8646	/전송	3708-8659	/	khs25@seoul.go.kr	/	대시민공개