문서번호	체육진흥과-8524
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생활체육정책팀장	체육진흥과장
정대권	최병윤	07/23 오제성

야간 시민운동을 위한 인프라 구축 지원사업

사업계획 내용 변경 요청에 따른 검토보고

문화관광디자인본부

(체육진흥과)

야간 시민운동을 위한 인프라 구축 지원사업

사업계획 내용 변경 요청에 따른 검토보고

학교 체육시설 야간 개방을 위한 시범학교(공릉중학교)로 선정되어 기 제출된 사업계획에 의거 사업비를 교부하였으나, 현장여건 사정에 따른 사업계획 변경 요청이 있어 이에 따른 검토 보고임.

□ 추진경위

○ ‘14.4.15 : 야간 시민운동을 위한 인프라구축 사업계획 제출

〔 노원구(공릉중학교) → 시 〕

○ ‘14.5.04 : 야간 시민운동을 위한 인프라구축 사업계획 승인

○ ‘14.5.08 : 야간 시민운동을 위한 인프라구축 지원사업비 교부

□ 변경개요

○ 사업내용 : 조명시설, 운동장 탄성포장, 음수대 설치 등

○ 지원예산 : 200백만원

○ 변경사유

- 당초 운동장 측구의 배수로를 재활용코자 하였으나 용역업체(토목엔지니어링) 진단결과 배수불량으로 인한 물고임 현상, 침하 등으로 포장완료시 들뜸 방지를 위한 배수로 신설, 높이 조절 등 추가공정 필요

- 기존 사업비 범위내에서 조명타워 형식을 변경(타워형→지주형) 하는 것으로 공릉중학교 운동장 인프라 구축사업 추진위원회와 합의

○ 변경내용

변 경 전	변 경 후
◦ 조명시설 설치 : 60,000천원 ◦ 운동장 포장공사 등 : 140,000천원 - 토목공사 25,300천원 - 관급자재대 114,700천원 소요예산 : 200,000천원	◦ 조명시설 설치 : 26,500천원 ◦ 운동장 포장공사 등 : 173,500천원 - 토목공사 58,800천원 - 관급자재대 114,700천원 소요예산 : 200,000천원

□ 검토의견

○ 당초 계획대로 시행할 경우 운동장 물고임, 침하, 포장 들뜸 등이 발생할 수 있어 이를 방지하기 위해서는 운동장 측구에 배수로를 설치해야 한다는 토목엔지니어링의 진단 결과에 따른 사업변경이며, 사업예산의 증액없이 조명시설을 변경하여 운동장 측구 공정을 추가하고자 하는 내용임.

○ 운동장 조명시설을 타워식에서 지주식으로 변경하더라도 야간에 학교체육시설을 이용하는 시민들의 운동장 사용에는 큰 불편이 없을 것으로 사료되고, 학교측의 개방의지가 확고한 바, 변경 요청한 사업계획 내용대로 추진하도록 변경을 승인하고자 함.

첨부 : 1. 야간시민운동을 위한 인프라 구축 사업 변경 승인 공문(노원구) 1부

2. 보조금 지원사업 분야별 투자금액 변경 승인 요청(공릉중)  1부.  끝.