문서번호	자원순환과-11228
결재일자	2014.7.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
김필동		정연구	07/29 최홍식
협조

강남자원회수시설 쓰레기 크레인 보수 추진 계획

2014. 7.

자원순환과

강남자원회수시설 쓰레기 크레인 보수계획

자원회수시설로 반입되는 생활폐기물에 대하여 혼합, 이송, 투입하는 크레인의 레일, 와이어, 드럼등이 노후되어 추락등의 위험이 있어 교체 및 보수하여 시설을 안정적으로 유지하고자 함

□ 근 거

○ 강남자원회수시설 위탁운영용역 과업지시서 제11조(위탁운영비용 집행) 제5호

- 단일사업으로 추정가격 3천만원 초과의 공사등은 서울시 승인

○ 쓰레기크레인 보수공사 승인 요청(강남HSGN 제2014-246호, 2014.7.16)

□ 현 황

○ 타     입 : OVER HEAD CRANE

○ 버켓 수량 : 4대(3대 설치 운영중이며 1대는 예비품)

○ 주행길이 : 72m

○ 횡행길이 : 23.1m

○ 주행속도 : 50m/min

○ 전원 : AC380V*3P*60Hz

○ 계통도

쓰레기 피트

쓰레기 크레인

소각로

폐열보일러

화격자 재이송장치

비산재 이송장치

재배출장치

비산재

저장조

쓰레기 처리 계통

쓰레기 처리 계통

○ 크레인 설치도면

보수 범위

❍ 설비현황

-  주행 레일의 편마모 발생 및 이음매부의 마모가 심하여 크레인 주행시  차륜측에서 소음이 발생되고 설비 전체에 진동이 심함.

-  각 구동장치 베어링(차륜 베어링 등)의 장시간 사용으로 내구력이 떨어짐.

-  드럼 마모와 구동 샤프트 파손으로 와이어 엉킴 현상이 발생될 수 있음.

-  와이어 및 고정용 부속품(샤클, 클램프 등)의 노후로 버켓 추락 위험이 있음.

❍ 설비사진

크레인 레일(횡행)	차륜 마모

레일 마모	와이어 드럼 및 샤프트

□ 보수방안

○ 횡행 레일 및 차륜, 드럼 샤프트 등 구동부 부속품을 제작하여 철거 후 신규 설치함.

○ 크레인과 버켓을 연결하는 와이어 및 부속품을 신품으로 교체함.

○ ‘14년 대정비 기간내 3개호기를 동시에 교체 및 보수

□ 보수범위

○ 크레인 구동부

- 횡행 레일 및 고정 부품 교체

- 드럼 샤프트 및 베어링 교체

- 차륜 및 차륜 샤프트 교체

○ 연결부 : 와이어 및 고정 부품 교체

□ 추진 계획

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(G2B)

○ 참가자격

- 제한사항 : 최근 10년 이내에 생활폐기물 소각시설(100ton·기/일 이상)에 천정형 크레인 관련(버켓 제외) 제작 및 설치 또는 유지보수 실적이 단일건으로 1억 이상이 있는 업체

- 제한사유 : 크레인 설비는 24시간 작동되고 3개호기가 연계되어 있어 시설 운영에 중요한 설비이므로, 제작 및 설치 또는 유지보수 실적이 있는 업체가 선정되어야 함.

- 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 2항 2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 해당 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 그 공사와 같은 종류의 공사실적

- 참가자격 면허 : 기계설비공사업

※ 운영사에서 필요한 사항은 추가하여 발주할 것.

○ 공사기간 : 계약일로부터 ~ 2014. 10. 30(대정비기간중 교체)

○ 소요예산 : 194,584천원

※ 운영사 산출금액 : 200,486천원

⇒ 자체심사금액 : 194,584천원(감5,902천원, 2.9%)

※ 3억이하 자체심사로 자재단가 조정에 따른 감액 발생

○ 추진일정

- 2014. 8월 : 입찰공고 및 계약

- 2014. 8월 ~ 9월 : 공장제작

- 2014. 9월 ~ 10월 : 현장 철거 설치(대정비기간 중)

□ 행정사항

○ 운영사에서 교체토록 통부

붙임 : 심사설계서 1부. 끝.