투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	용역기간 연기 요청 (한양도성 인왕지역 경관조명 설치공사 실시설계 용역)

우리 본부에서 시행중인『한양도성 인왕지역 경관조명 설치공사 실시설계 용역』과 관련 용역기간 연기를 아래와 같이 요청 합니다.

가. 용 역 명 : 한양도성 인왕지역 경관조명 설치공사 실시설계 용역

나. 용역금액 : ￦16,000,000원

다. 용역업체 : ㈜유엘피 대표 장희우

라. 용역기간 연기

1) 당초 : 2014. 05. 13 ~ 2014. 08. 20

2) 변경 : 2014. 05. 13 ~ 2014. 09. 30(증40일)

마. 연기사유

- 한양도성도감자문위원회 자문 및 군부대 의견 반영에 따른

용역기간 부족

바. 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

사. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 :  보고서 및 합의각서 각 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	이기철		녹색성장과장	김창균		설비부장	08/18 박기형
협조자
시행	설비부-9096	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8636	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(6)