함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	계약금액조정 검토결과 통보(암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사)

1. 생산부 기전설비과-5555(2014.8.19)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 검토요청한 암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사의 방호울타리 진동감지기 설치 외 7건에 대한 계약금액조정 검토결과를 붙임내용과 같이 통보합니다.

가. 공 사 명 : 암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사

나. 공사기간 : 2009.11.09  ～ 2014.10.30

다. 심사결과

(단위 : 천원)

구 분	심사요청금액	심사조정금액	증․감	비 고
계	- 410,169	- 422,848	감12,679
방호울타리 진동감지기 설치	143,964	142,962	감 1,002
활성탄흡착지 추가 조명 설치	40,921	31,275	감 9,646
계측제어케이블 추가공사	36,549	36,549	-
밸브동력설비 추가공사	56,390	56,390	-
본관동 가로등 이설공사	9,232	9,232	-
본관동 조경용 조명등 설치	18,054	16,023	감 2,031
송수관로 전기방식 전원 인입공사	14,194	14,194	-
임시동력공사 공종 삭제	-729,473	-729.473	-

붙 임 : 1. 계약금액조정 검토결과서 1부.

2. 설계내역서[당초(별도), 변경(별도)] 각1부. 끝.

	요금관리부장
주무관	임종수		재무회계과장	代한희균		요금관리부장	08/25 代박병만
협조자
시행	재무회계과-11058	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 94(합동 27-1)	/
전화	3146-1241	/전송	3146-1209	/	limjs1209@seoul.go.kr	/	대시민공개