다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	가로변정류소개선사업 감리용역 연장계약 승인

1. 서버조운 제875호(2014.9.18.)호와 관련입니다.

2. 정류소 현장 여건변화 및 승차대 추가설치 민원해소를 위한 승차대 및 버스정보안내단말기 설치 추가공사 시행과 총시설투자비 재정산 등을 위하여 가로변정류소개선사업 전면책임감리의 용역기간 변경이 필요한 것으로 판단되어, 전면책임감리 용역기간의 변경(3개월 연장)을 승인하오니, 연장 기한내에 사업이 완료될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울시버스운송사업조합,(주)케이티,(주)한국종합건축사무소
주무관	이철주		가로변정류소개선팀장	김송		버스정책과장	09/24 신종우
협조자
시행	버스정책과-18061	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2297	/전송	02-2133-1049	/		/	대시민공개