문서번호	설비부-11207
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김홍석		이흥복	10/13 박기형
협 조

「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사」

준공정산 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  10

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사 」

준공정산 검토 보고

『서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사 』공사완료로 책임감리원으로부터 준공정산 실정보고가 있어 아래와 같이 검토 보고함.

Ⅰ				관 련 근 거

□ 서지(감)제14-479호(2014.10.10.)『지하차도 전기공사(총차 4회) 실정보고』

Ⅱ				사 업 개 요

□ 위   치 : 양천구 신정3동 남부순환도로상 서부트럭터미널 앞 교차로

□ 규   모

- 토목 : 본선 L=1.35km, BOX 740m, 방음터널 210m, U-TYPE 335m

- 전기 : 수배전설비 1,150kw, 터널 1,106등, 가로등 92본

□ 공사기간 : 2008. 3. 10 ~ 2014. 10. 15

□ 총사업비 : 772억원 (전기 41억원 )

□ 감리 및 시공사 : (주)수성엔지니어링, (주)금호전력

Ⅲ				준공정산 주요내용

□ 가로등 설치 및 도로횡단 아스콘타설 물량 정산

□ 전력자동제어 설비 물량 정산

□ 전기실 외부 출입구 및 집수정 전등전열설비 설치 추가

□ 임시개통관련 감시인력 배치 및 운영전기요금 납부 정산

□ 안전관리비 및 보험료 등 제경비 정산

Ⅳ				준공정산 세부내용

□ 공사물량 변경사항

구 분	당 초	변 경	증.감 (천원)
가로등 설치공사	- 종점부 9본 설치 설계없음 설계없음 설계없음 설계없음	- 토목공사구간 조정(구로구 구간) 으로 종점부 9본 삭제 - 현장여건에 따라 시점부 2본 및 한성교회앞 1본 가로등 추가 가로등 표찰 95개 설치 지중케이블 매설 표지시트 3,720m 설치 도로횡단 아스콘타설 26톤 추가	증11,187
임시가로등 설치공사	설계없음	기존가로등 철거로 한전주용 가로등 16개소 추가설치 기존가로등 철거로 방음벽 투광등 6개소 추가설치	증13,577
전력자동제어 설비공사	- 집수정감시 제어반 #1,#2 - 설계없음	- 설비자동제어 설치분과 중복되어 제어반 2대 삭제 유지관리부서 요청으로 사업소 당직실 및 사무실에 원격감시설비 설치	감36,794
	비상전화 접수대 1대	2대 (사업소 접수대 1대 추가)	증 2,531
집수정 및 전기실 전등전열설비	설계없음	집수정 하부 전등 및 전열설비 추가 - 지하전기실 외부출입구 전등 및 순간온수기 전열 추가 등 (유지관리부서 요청)	증 3,509
	계		감 5,988

□ 보험료 등 정산

구 분	당 초	변 경	증.감 (천원)
산 재 보 험 료	26,908	27,462	증553
고 용 보 험 료	5,020	5,123	증108
국민건강보험료	10,337	598	감9,739
국민연금보험료	16,123	786	감15,337
노인장기요양 보험료	677	39	감637
퇴직공제부금비	14,953	5,645	감9,308
산업안전보건 관리비	43,710	38,967	감4,742
합 계			감39,108

□ 전기안전관리자 선임 연장 : 증28,881천원 (2014. 4월~ 10월분)

□ 전기요금 납부 : 증51,804천원 (2014. 1월~ 3월분)

Ⅴ				준공정산 결과

구 분	계약금액	정산금액	증․감(천원)
직접공사비	1,834,187	1,828,199	감 5,988
보험료 등 정산	117,731	76,424	감 39,108
기타 제경비	569,653	582,406	증 12,753
부가가치세	250,304	248,245	감 2,061
전기요금	66,799	118,604	증 51,804
물가변동(ESC)	146,684	129,904	감 16,780
도급액	2,985,360	2,985,980	증 620

□ 예산과목 : 도로안전실 도로계획담당관, 도로건설, 간선도로망확충, 서부트럭터미널앞 지하차도 건설, 시설비및부대비, 시설비

Ⅵ				보고자 의견

□ 현장여건의 변화 및 유지관리부서의 요구, 제경비 정산 등으로 인하여 변경된 설계에 대하여 책임감리원의 검토결과가 적정하다고 사료되어 재무과에 준공정산 계약의뢰 조치코자 함.

첨부 : 1. 감리원 실정보고서 1부

2. 변경 세부내역서 1부. 끝.