문서번호	체육진흥과-12028
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생활체육정책팀장	체육진흥과장
정대권	최병윤	10/17 오제성

석관동 철도용지내 생활체육시설 설치 지원계획

문화관광디자인본부

(체육진흥과)

석관동 철도용지내 생활체육시설 설치 지원계획

석관동 철도용지내에 생활체육시설을 설치하고자 성북구로부터 사업비 지원요청이 있어 사업내용을 검토하고 다음과 같이 지원하고자 함.

※ 광장동 체육공원내 임시시설 설치 취소 및 송파구 오금공원 사업철회에 대한 대체부지로 추진

1		근거 및 개요

□ 지원근거

○ 체육시설의 설치․이용에 관한 법률 제4조(국가와 지방자치단체의 의무)

○ 체육시설 확충 종합계획(‘13.12.16, 행정1부시장 방침)

○ 2014년 생활체육시설 확충 실행계획(‘14.3.12, 본부장 방침)

□ 설치개요

○ 위    치 : 성북구 석관동 14-5(이문차량기지 사업소내 공지)

○ 설치면적 : 1,023㎡(약 310평)

○ 사업내용 : 족구장 2면(16m×7m×2면)

○ 추진방법 : ‘14년 확충대상 사업취소(철회)로 인한 대체부지로 추진

○ 사업기간 : ‘14.10~‘14.12월

○ 지원금액 : 80백만원(40백만원×2면)

	< 차량기지내 공지 현황 >
◦ 위 치 : 서울시 성북구 석관동 14-57 ◦ 면 적 : 1,700㎡(약 515평) ◦ 시설현황 : 구)마사토 다목적구장으로 조성하여 코레일에서 활용하던 공지 ◦ 운영주체 : 성북구 문화체육과

2		요청사항

□ 확충내용

○ 위    치 : 서울시 성북구 석관동 14-5

○ 규    모 : 족구장(16m×7m)  2면

○ 사업기간 : ‘14.10～‘14.11

○ 요청금액 : 80백만원(40백만원×2면)

□ 확충 필요성

○ 코레일 이문차량사업소의 철도용지로 ‘14.3월 성북구와 이문차량사업소간 협약을 맺어 주민에 개방하기로 협의함.

○ 성북구내 생활체육회에 가입된 정식 동호회는 3개(회원 약 200명)이나 종교단체 등에서 활동하고 있는 족구팀이 많아 족구 수요는 많은데 비해 구에서 정식 관리하고 있는 구장은 없어 족구장 설치가 필요

□ 운영방안

○ 다목적 족구장을 설치하여 지역주민에 개방은 물론 미활용시는 인근 석계초등학교 학생들에게도 개방하여 이용을 활성화

3		검토 및 지원계획

□ 현장 확인내용

○ 현장확인 결과, 해당부지는 1호선 철도변과 중랑천변과의 사이에 위치한 부지로 당초 코레일 직원들이 미니축구장으로 조성하여 활용하던 공간임.

○ 현재는 미활용 공지로 철도변 안전펜스 등을 보강하여 생활체육시설인 족구장을 조성하여 인근 학교 학생들과 주민들에게 다목적 구장으로 개방시 이용도가 높을 것으로 예상됨.

□ 검토의견

○ 코레일에서 관리하던 미활용 공지를 구청에서 지속적인 노력과 설득으로 체육시설을 설치하여 시민에 개방하기로 협약을 체결한 부지로 생활체육시설로의 조성은 바람직한 것으로 사료됨.

○ 족구장 지원기준은 마사토구장, 배수시설, 바닥 토목공사를 포함하여 1면당 31백만원을 지원하고 있으나,

○ 코레일측과 개방협의시 안전펜스 추가 설치요구(철로변은 기존 4m→ 6m이상 요청)와 족구인들의 야간 조명시설 설치요구(족구연합회 및 동호회 민원) 민원이 있어, 이를 수용하여 1면당 40백만원씩 2면에 대한 조성비용 80백만원을 지원하고자 함.

□ 지원계획

○ 현재 부지에 족구장을 조성하는 것은 별도의 사전 행정절차가 없고 년내공사 발주 등 준공이 가능한 바,

○ 총사업비 80백만원을  ‘생활체육시설 확충’ 사업 포괄비 내에서 지원.

- 소요예산 : 80백만원

(안전 펜스설치 34.4, 바닥정비 등 토목공사  17.8, 마사토 포장 8.4, 족구장 네트 등 1.4, 조명시설 18)

- 예산과목 : 문화관광디자인본부 체육진흥과, 시민체육공간 확충,

생활체육시설 확충, 시설비

6		향후계획

○ ‘14.10～    : 사업비 예산 재배정(市 → 성북구)

○ ‘14.10~11 : 설계 및 공사발주

○ ‘14.10～12  : 공사 및 준공

붙임 : 1. 석관동 철도용지내 생활체육시설 설치계획(구청장 방침) 등 1부.

2. 위치도 및 시설 배치도 1부.  끝.

별  첨

□ 위치도

족구장 설치부지

□ 현장사진

준  공

협의중

준  공

준  공

설계중

설계중