문서번호	자원순환과-16815
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
정인수		정연구	10/30 최홍식
협조

노원자원회수시설‘14년 4/4분기 소각시설 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

기후환경본부

(자원순환과)

노원자원회수시설‘14년 4/4분기 소각시설 운영계획

노원자원회수시설 폐기물처리설비에 대한 전반적인 점검 및 정비로 고장발생을 최소화하고 설비의 안정적 운영을 위한 2014년 4/4분기 운영 정비 계획을 보고 드림.

1		일 반 현 황

❍ 시설규모 : 생활폐기물 소각시설 800톤/일(400톤/일×2기)

❍ 준공연도 : 1997.01.15

❍ 주요설비

- 소각설비 : 스토카식(로울러그레이트)

- 방지설비 : 백필터, SCR촉매탑, 환경오염방지시설 등 부대시설

2		소정비 개요

정비방향

❍ 안정적인 시설운영과 유지·관리를 위해 하반기 정기적인 소정비(예방점검,

경정비, 환경부분 청소 등)를 시행.

❍ 소정비 수행 일정은 폐기물반입량 부족, 연간가동율유지, 폐기물의

재고 부족분 등을 고려하여 수행기간 선정.

❍ 소정비 수행기간(15일간) 중 서울시 6개 자치구의 폐기물을 정상적으로

노원자원회수시설에 반입·처리하며 소정비 수행.

❍ 소각처리량(가동율)을 현 상태 유지 경우 폐기물 재고 부족 예상(2014.12.14.일 경)        되어 소각로 가동중지 예방.

정비대상 및 주요 정비내용

주요설비	주요 작업내용
소각로	∙연소실 내화물상태 점검 및 보수 ∙연소화격자 점검 및 보수.교체 ∙연소실벽체 부착 클린커 제거 및 청소
페열보일러	∙증발수관. 과열기. 절탄기 등 상태점검 및 청소
대기방지시설	∙전기집진기 내부점검 및 청소 ∙여과백필터 내부상태 점검 및 청소 ∙습식세정탑, SCR 촉매, 연소가스가열기등 점검,청소
기타	∙열공급시설등 공통 및 부속설비 등 점검,청소 ∙윤활유, 소모품 등 정기점검, 교체

※소각열 회수증대, 예방점검을 통한 고장발생방지, 설비내구수명 연장,

가동율향상 및 시설의 안정화를 위한 소정비 수행.

3		세부 추진계획

수행기간  :  11. 3 ∼ 11. 18  (15일간)

폐기물 소각중지
2호기	1호기	동시중지(1,2호기)
11. 3 ∼ 11. 13 (11일)	11. 8 ∼ 11. 18 (11일)	11. 8 ∼ 11. 13 (6일)
※1호기는 정상 소각운전 (320 톤/일)	※2호기는 정상 소각운전 (320 톤/일)	※1,2호기 모두 소각중지 (공통설비 점검,정비)

❍ 소각로 가동중지 일정

※ 6개 자치구의 폐기물 안정적 반입처리 위해 소각로 교대정비 실시

4		작업 기간 중 폐기물 현황

❍ 폐기물재고 확보 예상량 : 5,440 톤 (15일간 확보량)

∙ 1일 평균반입량 540톤 X 16일 소정비 수행 = 8,640톤

∙ 8,640톤 -(소정비기간중 소각로 1기 소각량 320톤/일 X 10일) = 5,440톤

❍ 소정비 수행후 소각로 재가동시 폐기물 총 재고보유량 = 9,330톤

5		행 정 사 항

❍ 운영 계획(안) 승인 후 시설 운영(소각로 일시정지)관련 사전 통보.

∙한국환경공단, SH공사집단에너지사업단, 주민지원협의체

❍ 소정비 관련 안전, 공정, 품질관리 철저 이행 : 운영사

첨부 1. 2014년 4/4분기 소각시설 운영계획 및 폐기물현황 1부. 끝.