문서번호	시설과-563
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김재희		임록화	진병규		02/26 이춘희
협 조
	주무관			송복식

「2015년 보라매공원 큰 둘레길 조성공사」시행계획

2015. 2.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「2015년 보라매공원 큰 둘레길 조성공사」시행계획

보라매공원 와우산과 북동산 등 외곽을 순환하는 큰 둘레길을 조성하는 공사를 시행하여 시민들의 건강증진과 공원 이용 만족도 향상에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

❍ 2015년 보라매공원 시설물 정비사업 추진계획 방침

(공원운영과-426, 2015.1.12.)

❍ 2015년 보라매공원 시설물 정비사업 세부추진계획 보고

(시설과-393, 2015.2.13.)

Ⅱ		추 진 방 향

❍ 보라매공원 외곽을 연결하는 숲속산책로를 조성하여 공원 이용객 만족도 향상

❍ 산책로에 안내시설 설치를 통해 걷기운동과 건강에 대한 다양한 정보 제공

❍ 산책로 주변 휴게공간을 조성하고, 계절별 꽃이 피도록 하여  휴식과 볼거리 제공

Ⅲ		사 업 개 요

❍ 위   치 : 보라매공원 내

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 7.

❍ 사업내용

- 큰 둘레길 조성 및 산책로 정비

- 남문 등산로 입구 설치

- 남문 목재데크 및 계단설치

- 노후 목재 계단 정비

- 시민안전체험관 뒤 등산로 신설

- 등산 로프, 경계휀스 신설

- 안내판, 스템프 설치

- 산책로 주변 화단 정비

- 토양개량 및 트렐리스 설치 등

❍ 총사업비 : 151백만원(공사비 140, 설계비 11)

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비

❍ 위치도(보라매공원 큰 둘레길)

보라매공원 큰 둘레길

❍ 현황사진

산책로 신설(시민안전체험관 뒤)	와우산 산책로 정비

Ⅳ		추 진 방 법

【설 계】

❍ 소요예산 : 10,332천원

(기술용역 타당성 심사 결과 반영)

❍ 계약방법 : 둘레길 조성 실적이 있는 업체에 수의계약

※ 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조 제1항제5호

❍ 용역기간 : 착수일로부터 60일간

【공 사】

❍ 소요예산 : 140,000천원

❍ 계약방법 : 일반경쟁입찰

❍ 공사기간 : 착공일로부터 60일간

Ⅴ		향후 추진계획

❍ 2015. 2. ~ 4. : 설계용역 시행

❍ 2015. 4.       : 자체 설계심사(시설과)

❍ 2015. 5. ~ 7. : 공사시행 및 준공

Ⅵ		사업 기대효과

❍ 보라매공원 외곽 산책로를 조성하여 공원 이용객 만족도 향상

❍ 산책로 주변 계절별 꽃이 피도록 하여 볼거리 제공 및 이용자 정서 함양에 기여

❍ 건강 정보 제공하여 시민 건강 증진에 기여.

붙  임 : 기술용역 타당성심사 결과 1부.  끝.