투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(2014년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사)

1. 우리과에서 시행중인 『2014년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(중계5단지)』의 준공기한을 아래와 같이 연기코자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(중계5단지)

나. 계약상대자 : 동광전기건설(주)  대표 이동은

다. 준공기한 연기

- 당초 : 2014. 11. 26 ∼ 2015. 2. 28

- 변경 : 2014. 11. 26 ∼ 2015. 6. 30

라. 연기사유

- 노원구 동절기 굴착금지로 공사기간 지연

- 토목공사(보도확장 및 가로등이설) 진행 후 신호등 공사

추진이 가능함으로 절대공기 부족으로 인한 준공기한

연장필요

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(노원구청 교통지도과)

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  1) 방침서 1부.

2) 준공기한 연기요청 및 연기의뢰서 1부.  끝.

	기전과장
★주무관	백윤광		기전과장	02/26 이영목
협조자	주무관	박정민
시행	기전과-1874	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번2동 365-1번지 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개