투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 변경요청(공릉 빗물펌프장 증설공사)

우리본부에서 시행중인 「공릉 빗물펌프장 증설공사」 관련하여 관급자재(수중펌프 외 9종) 납품기한을 아래와같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 변경내용

품 목	계약구분 (계약방법)	계약자	계약금액 (총부기금액)	계약일	변경사항 (기한연장)	비고
수중펌프	총액(제한)	동해 엔지니어링(주)	312,000,000	’13.08.23	·1 차:’15.02.28 ➜’15.10.31 ·총차:15.07.31 ➜’15.10.31
천장크레인	총액(제한)	㈜성진기계	51,902,400	’13.09.25	·1 차:’15.02.28 ➜’15.10.31 ·총차:’15.07.31 ➜’15.10.31
평면스크린	총액(수의)	사회복지법인 대한장애인복지회	94,000,000	’13.10.22	·1 차:’15.02.28 ➜’15.10.31 ·총차:’15.07.31 ➜’15.10.31
가동보	총액(수의)	㈜청수환경	131,607,520	’13.12.26	·1 차:’15.02.28 ➜’15.10.31 ·총차’15.07.31 ➜’15.10.31
수문권양기	총액(수의)	대양산업기계(주)	73,100,000	’13.05.06	·납기’15.02.28 ➜’15.10.31
버터플라이밸브	3자단가	㈜현대밸브	54,351,000	’13.11.05	·납기:’15.02.28 ➜’15.10.31
플랩밸브, 신축관	3자단가	㈜현대밸브	49,516,000	’13.11.05	·납기:’15.02.28 ➜’15.10.31
체크밸브	3자단가	㈜현대밸브	92,130,000	’13.11.05	·납기:’15.02.28 ➜’15.10.31
냉난방기	3자단가	엘지전자(주)	11,052,500	’13.12.17	·납기:’15.02.28 ➜’15.11.30
냉난방기	3자단가	엘지전자(주)	2,122,000	’13.12.17	·납기:’15.02.28 ➜’15.11.30

2. 변경사유 : 선행공정 지연에 따른 관급자재 설치시기 미도래

3. 지체상금 : 미부과

첨  부 : 1) 관급자재 납품기한 보고서  1부

2) 변경내역서  1부

3) 변경동의서  7부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		녹색성장과장	김창균		설비부장	02/26 박기형
협조자	경리과장	허금도
시행	설비부-2415	(		)	접수		(		)
우	100-177	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개