보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손현정	이경희	02/26 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 관악구 봉천동 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이

있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	***************	D=300mm, L=7m	개량-69	지장 상수도관이설

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 현장여건상 공사중 수계전환 및 단수시 행운동 일대 급수세대의 수압저하등 민원 발생의 우려가 있어 불가피하게

공사기간 연기가 필요한 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
개량-69	’14.11.20. ~ 02.15.	’14.11.20. ~ ’15.03.10.

끝.