함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰[동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)]

우리사업소에서 시행중인 『동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)에 대하여 신규공종발생 및 물량증감에 따른 계약금액 변경에 따라 아래와 같이 설계변경(3차최종)계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구상수도공사(장기계속단가계약)

2. 도 급 자 : 비와이건설(주) 대표 정유상

3. 계약기간 : 2015.01.01~2015.06.30(총부기기간:2014.05.30~2015.06.30)

4. 설계변경사유 : 신규공종발생 및 계약물량증감에 따른 금액변경                      5. 설계변경 금액내역                                         (단위 : 원)

구 분	2차수 계약금액			총부기금액			비 고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
도급비	254,066,050	259,822,000	증)5,755,950	653,784,050	659,540,000	증)5,755,950

6. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사비(급수공사),신설공사비,신설공사비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비(불용관정비),수선유지교체비,기타교체비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비(수도계량기보호통보온재정비등),

수선유지교체비,자원사업성시설비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비(교체장애수전),수선유지교체비,

상하수도관교체비

첨 부 : 1. 설계변경 시행서 1부.

2. 설계변경갑지 및 조정내역서 각1부.

3. 계약금액조정 검토결과통보 및 검토결과서 각1부.

4. 제비율검증 및 합의서 각1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	남상욱		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	02/26 代김태형
협조자
시행	급수운영과-4397	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 고산자로10길 13 (행당동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2761	/전송	3146-2789	/		/	부분공개(7)