문서번호	서울숲공원관리사무소-1075
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영팀장	서울숲공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
김병수	최원아	代최원아		02/27 이춘희
협 조
	주무관		이전호

서울숲공원 수변휴게실 내부시설 정비 계획

2015. 2.

동부공원녹지사업소장

서울숲공원관리사무소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울숲공원 수변휴게실 내부시설 정비 계획

서울숲공원내 민간위탁시설인 수변휴게실(위탁공간 및 전시실)에 대하여 기본적인 내부 시설을 정비하여 수탁자 및 전시시설 사용에 지장이 없도록 하고자 함

Ⅰ				개 요

수변휴게실 공사개요

○ 위  치 : 서울숲 커뮤니티 센터1층

○ 1층 공사면적 : 183㎡

- 임대공간 107.5㎡ / 전시실 75.5㎡

○ 공사기간 : 2015. 3 ~ 2015. 5 (착수일로부터 70일)

문제점 및 개선방안

○ 민간위탁시설인 수변휴게실(체인화편의점 및 휴게음식점)의 기본적인 시설 및 인테리어를 수탁자 부담으로 설치함에 따라 기간만료된 후 다음 수탁자에게 권리금을 요구하는 등 부작용 발생우려 및 시설비 회수를 위하여 계약기간이후에도 무단점유등에 부작용 발생우려

⇒ 금번, 수탁자가 교체되는 시점에서 위탁시설의 기본적인 내부시설을 정비한 후 수탁자에게 인계하여 향후 권리금 등 부작용을 사전에  차단하고자 함

○ 줄어든 임대면적에 대하여는 서울숲에서 보유한 나비, 곤충 표본 등을 전시하여 교육프로그램등에 활용하고자 함

Ⅱ				세부 추진 계획

정비 대상시설 및 방법

○ 대상시설

- 수변휴게실(체인화편의점 및 휴게음식점) : 107.5㎡

․ 천 정 : 일부파손된 흡음천장재는 기존 천장재에 남는 재료를 이용하여 보수와 삼파장 등도 기존 남는 재료를 이용하여 보수

․ 바 닥 : 유지관리가 용이한 보행용바닥재 시공

․ 벽 체 : 합판 및 석고보드로 벽체시공 후 도색

- 전 시 실 : 75.5㎡

․ 천 정 : 기존 흡음천장재를 제거하고 기존 전시실과 동일한 석고보드 및 도색시공하고 기존 삼파장 등기구를 LED등으로 교체하여 기존 전시실과 동일하게 시공

․ 바 닥 : 기존 전시실과 같은 보행용 바닥재 시공

․ 벽 체 : 합판 및 석고보드로 벽체 시공 후 도색

○ 정비방법 : 사업자등록을 필한 정비업체와 수의계약

○ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

제1항 제5호

소요 예산 : 22,000천원

○ 산출내역

․ 건축공사 : 22,000천원

- 천정 : 천장 석고보드 시공 및 도색

- 벽체 : 석고보드 및 합판시공 도색

- 바닥 : 보행용바닥재(3t, 데코타일)

- 기타 : 폐기물처리등

※ 전기,설비공사 : LED등기구 구매, 냉난방 에어컨 천정 매립형 구매

별도설치 예정

예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시

녹화지원, 공원․녹지관리수준향상,  공원관리및도시녹화지원, 동부

공원녹지사업소산하공원유지관리,서울숲공원시설물정비,시설비

공사계획

○ 2015. 3. 4    : 계약 및 착수

○ 2015. 3. 10~  : 철거, 천장 및 벽체공사

○ 2015. 3. 15~  : 바닥공사

○ 2015. 4. 10   : 위탁공간 공사완료

○ 2015. 4. 20   : 전시공간 공사완료

○ 2015. 4. 30   : 준공

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.