투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시 용산구 한남대로42길14(한남동 794-6) 2층 B호 (주)제아건축사사무소 대표이사 귀하
(경유)
제목	사업계획 변경에 따른 설계용역 반영 요청(주얼리 비즈니스센터 건립공사)

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약체결하여 진행중인『주얼리 비즈니스센터 건립공사』설계용역과 관련하여 사업계획이 일부 변경되어 아래와 같이 통보하오니, 과업내용에 반영 후 설계용역을 진행하시기 바랍니다.

변경사항 -

가. 지하층수 조정 : 당초 지하3개층 → 변경 지하2개층

나. 연면적 조정 : 당초 710.17㎡ → 변경 430㎡

다. 이격거리 확보 : 인접건물 외벽으로부터 1.5m 이상 이격

라. 인접건물 보강방안 검토.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이수호		환경시설과장	신명승		건축부장	02/27 김우성
협조자
시행	건축부-2337	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	shlee1984@seoul.go.kr	/	대시민공개