문서번호	관광정책과-2286
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	관광서비스개선팀장	관광정책과장
오태숙	탁기주	02/27 이기완

진관사 전통음식체험관 건립 지원

사업결과 및 정산보고

2015. 2.

진관사 전통음식체험관 건립 지원 사업결과 및 정산보고

전통사찰 전통음식 만들기체험, 시식체험, 전시상설체험관 건립으로 해외관광객 유치에 이바지 하기 위해 추진한 『진관사 전통음식체험관 건립 지원』사업 추진결과 및 사업비 집행내역을 보고드림

1		사업개요

□ 사 업 명 : 『진관사 전통음식체험관 건립사업 지원』

□ 사업기간 : ‘13. 1. 1 ~ ’15. 2. 28.

□ 시행주체 : 대한불교조계종 진관사

□ 사업내용

○ 사업목적

- 전통음식체험관 건립을 통해 1700년 전통의 사찰음식을 계승 발전시키고,   현대사회에 맞게 대중화 하여 국민건강에 기여함.

- 전통음식 만들기, 시식, 전시등 상설체험장 운영을 통해 외국인 관광객    유치에 적극 활용하며, 이를 매개로 전통음식의 세계화, 대중화에 기여함.

○ 사업추진방법

- 설계 및 시공사 선정위원회 구성을 통해 업체 선정

- 전통음식체험관 건립추진위원회 구성 및 운영

- 공사추진실무회의 운영(발주처, 설계 감리, 시공)

- 추진과정 : 설계사무소 선정 →〉기본설계 →〉실시설계 →〉시공사 선정              →〉착공 →〉시공 →〉준공

2		세부 추진실적

□ 추진실적

○ 한옥전문설계업체 선정 - ㈜구가도시건축

○ 한옥시공업체 선정 - ㈜ 우리문화

○ 건립추진위원회 구성(11인)

- 위 원 장 : 진관사 주지 계호, 진관사 고문 김효수

- 부위원장 : 진관사 총무 법해, 신도회장 전두인

- 추진위원 : 진관사 신도호 임원, 건축관련 전문가, 사찰관련자(7인)

- 실무간사 : 종무실장 주상숙

○ 건립추진 실무회의 운영

- 운영일시 : 매주 화요일 오전 9시/진관사

- 참석대상 : 위원장 김효수, 부위원장 법해, 추진위원 심대근, 김응철, 간사,               설계사무소 2인, 시공사대표 및 현장소장

○ 계획대비 사업추진 실적

추진시기	사업계획	추진시기	추진실적
2013년 1월~3월	마스터플랜 확정/현황측량 완료	2013년 1월~3월	마스터플랜 확정
2013년 3월~6월	설계사 선정 및 설계 확정	2013년 4월	현황측량완료/세부설계 실시
2013년 6월~9월	허가 완료/시공사 선정	2013년 9월	건축허가 및 시공사 선정
2013년 9월	공사 착공	2013년 9월	공사 착공
2014년 5월	공사 준공	2015년 2월	공사준공 및 정산보고서 제출

3		사업추진성과

□ 추진성과

○ 전통음식체험관 건립(2015년 2월 준공)

연번	건 물 명	면적(㎡)	구 조
1	사찰음식체험관	402.99	한식목구조/철근콘크리트
2	체험동	90.45	한식목구조
3	관리동	160.80	한식목구조
4	조경, 석축, 주변정비
건축면적 합계		654.24

○ 전통음식의 보존 및 계승발전을 위한 시설 조성

- 전통음식체험관 건립 조성을 통해 전통음식인 사찰음식을 보존 계승할 수          있는 기반이 조성됨.

- 전통 목조건물로 조성되어 이용자 편의를 위한 화장실등이 잘 조성됨.

○ 전통문화체험을 통한 관광자원 활용 기반 조성

- 불교문화, 한옥, 사찰음식, 다도 등의 전통문화체험의 장이 조성됨으로서         외국인 관광객 유치를 할 수 있는 여건이 조성됨.

- 북한산의 수려한 자연환경 및 기존 사찰 건물과의 조화로움을 유지하여          편안하며 멋스러운 환경이 조성됨.

4		사업비 정산

□ 사업비 정산 및 집행내역

○ 총사업비 : 3,536백만원

○ 집행내역

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목	지원액		집행액	잔액	집행율	예산비율
전통음식체험관 건립사업	민간단체 자본보조	국 비	1,400	1,400	0	100%	40%
		지방비	400	400	0	100%	11%
		자부담	1,737	1,737	0	100%	49%

※ 발생이자(이자수입) : 179,362원(세외수입 처리)

□ 정산서 검토결과

○ 진관사에서 제출한 사업비 정산보고서 및 증빙자료를 검토한 결과 당초       사업계획에 의거 이상 없이 집행되었음.

□ 정산결과 조치계획

○ 사업 정산결과에 따른 발생이자액 세입처리

- 세외수입 고지서 발급(세무과)에 의한 세외수입 조치