문서번호	정수시설과-606
결재일자	2015.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	02/27 박기석
협조

정수장 노후 제어시스템 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 노후 제어시스템 교체 계획

내용연수가 경과하여 부동작 또는 오동작이 발생되고 있는 여과지동 등의 제어설비(Relay판넬) 시스템을 교체하여 안정적인 수돗물 생산 운영에 철저를 기하고자 함.

❏ 관련근거

❍ 2014년 전기설비 안전진단 보고서 (경기북동부지사-5663 : 2014.7.18)

- 여과지동 등의 제어설비 중 Relay판넬은 노후로 설비교체가 요구됨

❍ 내용연수(10년) 경과 [조달청고시 제 2011-18호]

❏ 정수장 Relay시스템판넬 시설현황

구 분	계	여과지동	약품투입동	송수펌프동	염소투입동	탈수기동
설치대수	26면	12면	6면	3면	2면	3면
제작년도	-	1997년	1997년	1997년	1997년	2013년

❏ 2015년 교체계획

❍ 여과지동 : 12면

- 1,2계열(6면), 3,4계열(6면)

❍ 약품투입동 : 6면

- 1,2계열(3면), 3,4계열(3면)

❏ 사업개요

❍ 사업내용

- Buffer Relay Panel 6면 교체

- Aux. Relay Panel 8면 교체

- 전원공급반(PDP) 4면 교체

- 기타 철거 및 설치공사 1식

❍ 소요예산 : 약 293,000천원

- 예산비목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

❍ 사업기간 : 2015. 3월 ~ 2015. 6월

❏ 시행방법

❍ 입찰방법 : 지명경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조제10호에 의거 지명경쟁입찰에 의함

❍ 지명업체 선정

- 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조제1항에 의하여 직접생산 증명서를 소지한 업체로서 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제23조(지명입찰대상자의 지명)에 의한 우수업체 5개사 이상을 추천을 받아 선정

❍ 계약의뢰 : 본청 재무과 (기술심사: 본부, 계약심사: 본청)

❏ 예정일정

❍ 기술심사 : 2015. 3. 2.

❍ 계약심사 : 2015. 3. 10.

❍ 계약의뢰 : 2015. 3. 20.

❍ 시운전 및 준공 : 2015. 6. 30.

❏ 기대효과

❍ Relay시스템 부작동 또는 오동작 방지로 자동제어시스템 최적운영

❍ 감시제어설비 최적운영으로 안정적인 정수생산

붙임: 1. 설계내역서 1부.

2. 시스템 구성도면 1부. 끝.