			중부수도사업소
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	용역 변경계약 체결 보고(통보) [2014년 자동제어설비 유지관리 용역]

1. 시설관리과-5112(2015.2.26.)호와 관련입니다.

2.『2014년 자동제어설비 유지관리 용역』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 보고(통보)합니다.

가. 계약건명 : 2014년 자동제어설비 유지관리 용역

나. 계약업체 : **********************************

************************

다. 계약금액

- 당초 : 총부기금액 금86,041,271원(2차수 금28,133,971원)

- 변경 : 총부기금액 금84,255,600원(2차수 금26,348,300원)

- 감액 : 금1,785,671원

라. 계약기간

- 당초 : 2014.03.03.~2015.02.28

- 변경 : 변경없음

마. 변경사유 : 용역 완수에 따른 작업물량 정산

바. 보증서 관련사항

- 계약보증서 : 해당없음

- 선금보증서 : 해당없음

붙임 : 변경계약서 및 합의서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	은정호		행정관리팀장	김맹순		행정지원과장	서경만		중부수도사업소장	02/27 설동을
협조자
시행	행정지원과-3969	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2043	/전송	3146-2244	/	younieun@seoul.go.kr	/	부분공개(7)