문서번호	방재시설부-2654
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
임성은		신용우	02/27 임춘근
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길)』

조경공사 실정보고사항검토 보고

2015. 2

서울시도시기반시설본부

[방재시설부]

『도시고속도로 연결램프(정릉길)』

조경공사 실정보고사항검토 보고

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사』와 관련 본 공사시행전    지장수목 이식 및 제거에 대한 실정보고 사항 검토임.

- 관련근거 : 극감정릉 제15-45(2015.02.24)호

공사현황

○ 위    치 : 성북구 정릉동 국민대 앞(정릉램프 주변)

○ 규    모 : L = 533m, B = 5m

- 신설램프 120m(교량), 본선확장 82m, 보도BOX 31m

U-TYPE 37m, 토공구간 263m

○ 공사기간 : 2013.12.30 ～ 2016. 12. 29

○ 도급비 : 조경168백만원(전체 8,992백만원)

○ 감리사/시공사 : 극동엔지니어링/풍림산업(주)

실정보고사항(조경)

구 분	실정보고 내용	책임기술자 검토의견
지장수목 수량 변경	▶ 식재수목, 이식수목, 제거수목중 이식대상 수목인 스트로브잣나무 14주를 관할지역인 성북구청과 ‘14.11.20 현장에서 협의한 바 제거하자는 사항임. - 식재수목 교목 32주, 관목 6,830주 - 이식수목 교목 34주 → 20주(-14) 관목 550주 → 550주 - 제거수목 교목 137주 → 151주(+14) 관목 4,170주 → 4,170주	▶ 수목관리부서인 성북구청 공원 녹지과에서 현장 수목상태 조사 후 협의 사항을 반영 하였으므 로 이식목인 스트로브잣나무 14주 를 제거하고 변경된 공사비는 추후 설계변경시 조정하고자 함.

공사비 증감 현황

(단위:천원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
수목식재	70,875	70,875	-
수목이식	10,219	7,894	2,325
수목제거	8,228	8,648	420
소 계	89,322	87,417	1,905
제 경 비	33,763	32,368	1,395
합계	123,085	119,785	3,300

검토결과

○ 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사 지장수목 처리에 대한 실정보고 사항으로 내용 검토한 바, 본공사 시행에 앞서 처리해야 하는 토공기초작업에 대한 책임기술자의 검토의견을 수용 하고자 하며

증감액이 3,000만원 이하이므로 설계변경 소위원회 심의대상에서  제외되므로 추후 설계변경에 반영토록하고, 지장수목 이식후 관할구에 인계가 원활히 추진될 수 있도록 목록을 작성 보고하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임 : 실정보고(수목이식 및 제거) 승인요청 공문서 1부.  끝.