문서번호	시설개선과-1786
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
김태욱		02/27 신동호
협 조
	주무관			지양수
	주무관			진종구

잠실실내체육관 옥상 점검통로 개선공사 시행계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

서울시체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실실내체육관 옥상 점검통로 개선공사 시행계획(안)

잠실실내체육관의 옥상공사 및 시설물 안전점검시 옥상통로가 협소하여 불편을 야기하는바, 옥상공사 및 점검을 위한 『옥상 점검통로 개선공사』를 시행하고자 함.

Ⅰ		근 거

시설개선과-1210(2015.2.6.) 실내체육관 환기설비 개선공사

시설물(환기팬 36대 점검, 향후 옥상공사 포함) 안전점검 등 옥상출입

Ⅱ		시 설 개 요

시설물 현황

○ 시 설 명 : 잠실실내체육관

○ 준공일자 : 1979. 04. 30(약 36년 경과)

○ 규    모 : 지하1층 지상3층, 연면적 26,095.87㎡

○ 구    조 : 철근콘크리트조, 철골트러스, 평스라브 돔구조

○ 시설물 종별 및 등급 : 2종시설물, C등급

○ 현황사진

옥상점검구	옥상점검구 계단

Ⅲ		공 사 계 획

공 사 명 : 잠실실내체육관 옥상 점검통로 개선공사

사 업 비 : 22,000천원

공사내용

○ 건축공사

▸ 점검구 주변 옥상 콘크리트 Slab 1.5㎡ 제거 및 철골재 보강공사

▸ 경량철골 계단설치 , S/W패널 계단실  4.5㎡ 설치, 계단실 주변 방수공사 등

○ 전기공사

▸ 계단실내 조명등 설치 등 부수공사

공사기간 : 착공일로부터 30일간

계약방법

○ 건축공사 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 → 소액)

Ⅵ		예산집행계획

소요예산 : 22,000천원

○ 예산집행 : 잠실실내체육관 환기설비 개선공사 집행잔액 활용

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 유지관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실운동장 시설개보수, 시설비(체육진흥투표권 수익금)

Ⅴ		추 진 계 획

'15.03 : 공사발주

'15.03 : 계약 및 착공

'15.04 : 준공