문서번호	교량안전과-3089
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장		도시안전기획관
이기승	류봉현	이용심		전결 02/27 권기욱
협 조

2015년 수중구조물 점검계획

2015. 2.

도시안전본부

(교 량 안 전 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015 수중구조물 점검계획

한강 및 지천에 설치된 교량의 안전한 관리를 위한 2015년 한강교량 수중구조물 점검계획을 수립하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점검현황 및 개요

□ 목적 : 한강교량의 수중구조물의 손상부를 조기에 발견하여 적기에 보수·보강함으로 시설물의 안전성 확보

□ 대상 :  32개 교량 1,360기

구 분		교량현황	수중구조물 현황			비고
			계	본교	램프
합 계		32	1,360	1,207	153
한강교량	횡단	19	830	714	116
	종단	5	477	450	27
지천교량	안양천	3	14	11	3
	중랑천	4	37	30	7
	탄천	1	2	2

※ 잠실철도교 : 서울메트로 관리시설물로 수중구조물 점검대상 제외

□ 점검주기 : 교량의 정밀안전진단 시행 시기를 고려하여 5~6년 주기

□ 그간 추진현황

○ 1회차(’00년 ~’04년) : 한강상 교량 19개교   674기 점검

○ 2회차(’05년 ~’09년) : 한강상 교량 24개교 1,027기 점검

○ 3회차(’10년 ~’14년) : 한강 및 지천 32개교 1,121기 점검

○ 2014년 6개 교량 213기 점검

- 점검기간 : 2014.5 ~ 2014.12

- 소요예산 : 460백만원

- 점검결과 : 구조안전 위협 요인 발견 안됨

Ⅱ		2015년 점검 추진계획

□ 추진방안

○ 점검 장비 운영 및 관리 방안을 수립하여 계획적이고 효율적 점검업무 수행

○ 수중점검의 효과 극대화를 위해 차년도 안전진단 대상 교량 우선점검

(‘15년 점검 → ‘16년 분석)

○ 체계적이고 효율적인 자료 관리를 위한 기존 아날로그 데이터의 디지털화

○ 점검장비 개량을 통해 장비 호환성 향상으로 점검업무 효율성 증대

□ 점검개요

○ 점검대상(한강 7, 지천 2) : 광진교외 8개 교량

(한강:광진,청담,성수,한남,한강,성산,행주대교, 지천:양화교,양평교)

○ 사업기간 : ‘15. 3 ~ ‘15. 12

○ 사업내용 : 수중구조물 206기 상시점검

○ 사 업 비 : 715백만원(점검용역 500백만원, 공공운영비 등 215백만원)

□ 장비 운영계획

○ 운영방식 : 1개조 상시점검, 필요시 2개조 운영(외부용역 활용)

- 장비 특수성으로 절대 정비 기간 필요

- 수상 및 수중에서 점검이 이루어져 예상치 못한 장비고장 발생

○ 운영기간 : ‘15. 4 ~ ‘15. 11

- 실제 운영기간 : 6개월(4,5,6,9,10,11월)

‣ 7~8월 우기시 점검불가

‣ 11월 하반기 동절기

- 15일/월 × 6월/년 – 동절기 10일 = 80일/년간

○ 운영계획

- 1개조 60일(75%), 2개조 20일(25%)로 운영

Ⅲ		수중구조물 점검 개선 계획

□ 점검장비간 호환성 확보

○ 현 황

- 점검선간 컨트롤 박스 운영 체계 상이(점검선 2호만 유닉스)

- 점검선 2호 컨트롤 박스 고장시 대체 운영이 불가

○ 개선방안

- 점검 장비간 컨트롤 박스 운영체계 통일(유닉스 → 윈도우 변경)

○ 소요예산 : 29백만원

- 컨트롤 박스 및 케이블선 교체 (9백만원)

- 케이블 드럼 및 수중카메라 등 교체(20백만원)

□ 아날로그 데이터의 디지털화 및 데이터 통합관리

○ 아날로그 Data의 디지털화로 자료의 통일성 및 접근성 향상

○ 현 황

<기존영상자료>

- 아날로그 방식인 비디오 테이프로 촬영 저장으로 현재 사무기기로 자료 접근이 불가

- 습기 등으로 인한 보관시 자료의 훼손 우려

○ 개선방안

- 디지털 변환 자료 관리

∙ 디지털 변환기기를 통한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변경관리

∙ 디지털 자료 변화로 자료의 통일성 확보

○ 소요예산 : 4.5백만원( ’14년도 5백만원)

- 예산과목:시설물 품질향상 및 유지관리(사무관리비)

Ⅳ		2015년 사업계획

□ 2015년 한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역시행

○ 용 역 명 : 2015년 한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역

○ 입찰방식 : 일반공개경쟁

○ 용역기간 : ‘15. 4 ~ ‘15. 12

○ 용 역 비 : 500백만원

○ 점검대상 : 9개 교량 206기

(광진,청담,성수,한남,한강,성산,행주,양화교,양평교)

○ 세부 추진일정

-  ‘14. 3월 : 용역 발주 및 계약

-  ‘14. 4 ~ 12 : 용역 시행

□ 수중조사팀 현장사무실 축조

○ 사 업 명 : 수중구조물 조사팀 현장사무실 축조공사

○ 사업개요

-  위   치 : 용산구 용산동 6가 69-136(도로)

-  건물규모 : 지상1층, 연면적 120㎡, 사무실 및 창고 1개동

○ 사업 주요내용

-  수중구조물 조사팀 현장사무실을 위한 가설건축물 창고(10m×12m,

연면적 120㎡) 1개동 축조(철골조+판넬조)

○ 총사업비 : 144백만원(공사비 132백만원, 설계 및 감리비 12백만원)

○ 사업기간 : 180일간(설계 60일, 시공및감리 120일)

□ 장비수리

○ 목    적 : ‘15. 4월 수중 구조물 점검을 위해 필요한 장비 수리

○ 대상장비 : 모선, 고무보트, 점검선 2호, 점검선 3호

○ 수리내역 : 고무보트 선미(콘)등 4건 수리 , 점검선 3호 윈치교체등              10건수리

○ 소요비용 : 총 10,000천원

○ 지출방법 : 일반지출(공공운영비 활용)

첨  부   1. 수중구조물 전수조사 현황 1부.

2. 점검장비 현황 1부.

3. 년간 수중구조물 점검일 산정 1부.

4. 기존 수중구조물 점검자료(영상) 현황 1부. 끝.