문서번호	급수운영과-3121
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수설비팀장	시설관리과장	급수운영과장		남부수도사업소장
이경희	우종근	장시명		02/27 전영석
협 조
	행정지원과장		이두영
	요금과장		이현우
	현장민원과장		이자화
	시설관리팀장		고신석
	주무관		정헌석

빅데이터를 활용한

유수율 향상 추진계획

2015. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

빅 데이터를 활용한 유수율 향상 추진계획

기존의 유수율 분석 방법을 탈피해서 광범위한 행정정보를 이용한 빅데이터(Big Data)를 활용하여 과학적인 분석시스템 구축하여 업무의 효율성을 높이고, 유수율 향상으로 상수도 경영개선에 기여코자함.

Ⅰ		추진배경

□ 기존의 유수율 분석 방법 한계 봉착

❍ 기존의 유수율 분석은 과거 유수율 80%대의 분석방법으로 유량관리 시스템을 이용한 공급량과 조정량 자료를 기초로 한분석 방법으로 한계에 봉착하여 새로운 분석방법 필요

□  지난해 유수율 목표 미달

❍ 2014년 사업소 유수율 93.79%로 목표 94.40%에 0.61%  미달로 금년도 유수율 목표달성이 절실히 요구됨

□  빅테이터(행정정보)를 활용한 소.출수민원의 선제적 대응   방안이 필요

❍ 소․불출수 민원의 선제적 대응을 위하여 행정정보(지역특성 및 인구 등 통계자료) 빅데이터를 활용한 사전 조치방안 필요

Ⅱ		추진경과

□ 유수율 제고 업무협력 MOU 체결 : 2014. 2.28

❍ 각종 상수도 행정정보를 통계데이터 형태로 가공한 빅데이터 정보로 제공키로 ㈜웹솔루스와 협약체결

□ 빅 테이터 시스템구축 및 안정화 : 2014. 3.15~6월

❍ 지오코딩(Geocoding)을 이용한 분석시스템 개발(비예산)

□ 빅테이터를 이용한 중블록 오류코도 개선: 2014.7월

❍ 상수도 GIS와 아리수인포간의 중블록 코드 불일치 대조 수정

□  소·불출수 지역 원인분석 작업: 2014. 7월~12월

❍ 신림3증압 구역에 소·불출수 민원이 발생하여 원인을 분석하고 해소대책 제시(2015년 폄프용량 확대 예정)

Ⅲ		빅 데이터 활용 방안

□ 빅 데이터와 GIS 결합

□ 통계청 인구자료 적용으로 실제거주인구 반영 : 정확한 물사용량(ℓpcd) 평가

□ 인구, 주택, 지역특성과 결합 : 상수도 소비패턴 분석

□ 유수율 분석 프로그램 개발 확대

❍ 빅데이터를 활용한 웹기반 GIS 분석 플랫폼 구축하여 수도검침  자료 및 민원자료를 공간 DB화 하고 통계청 통계분석과 접목

❍ 상수도 GIS의 데이터(상수도시설, 급수구역)와 상수사용량 영향인자 (인구, 주택, 지역특성)와 결합하여 공급량 격등지역의 추출

Ⅳ		2015년 추진계획

□ 빅데이터를 활용한 새로운 개념의 유수율 분석시스템  구축 확대

❍ Geocoding을 이용한 유수율 분석프로그램 확대 개발

- 기간 : 2015. 2월~3월

- 개발업체 : 사업소와 MOU체결업체 ㈜웹솔루스

❍ 개발목적

- 기존의 유수율 분석은 과거 유수율 80%대의 분석방법으로 유량관리 시스템과 아리수인포시스템을 활용한 공급량과 조정량 자료를 기초로 한 분석으로 좀 더 정밀하고 광범위한 분석방법 필요

□ IT 기반의 과학적인 공급량 관리

❍ 추진기간 : 2015. 4월~7월

❍ 추진부서 : 중블록 공급량관리 담당부서

❍ 추진방법

- 빅데이터(Big Data) 지오코딩 기술을 수전대사 작업에 접목하여 수용가 위치정보 분석

- 소·불출수 등 각종민원과 조정량, 공급량 등 빅데이터를 GIS 기반에 접목하여 소·불출수 지역과 공급량 변동 추이를 기초로하여 누수여부 조사

❍ 세부추진 일정

- 프로그램 적용 : 2015. 3월

- 대상지역 선정 : 2015. 4월

- 수계별 공급량 조정 : 2015. 5월~7월

□ 중블록 오류수전 정비

❍ 추진기간 : 2015. 3월~7월

❍ 추진방법

- 빅데이터를 활용한 분석프로그램을 이용하여 중블록별 수전 대사작업 후 착오입력 수전 정비

- 아리수 인포와 GIS 중블록 경계 불일치 수전 도출

· 테이블기반의 각종 정보에 지리적위치 정보 결합(Big Data를 시각화)구축

❍ 세부 추진일정

- 기본자료 분석 : 2015. 3.2 ~ 4월

· 조사수전대상 : 269,428수전

- 오류유형 분석 : 2015. 5월 ~ 6월

· 지오코딩기술을 수전대사 작업에 접목 수용가 위치정보 오류분석

· 오류유형

▷ GIS상의 중블록경계 불일치

▷ 아리수인포시스템 중블록코드 불일치

- 오류내용 정비 : 2015. 7월 ~ 8월

· 오류내용 요금과 통보하여 수전대장 정비

□ 소출수민원 선제적 대응

○ 추진개요

- 빅데이터를 활용하여 소출수 예상지역 선제적 대응

○ 추진계획

- 추진기간 : 2015. 3월 ~ 6월

- 추진방법

· 빅테이터를 활용하여 거주인구 변동에따른 적절한 공급량조정

· 가압급수 지역에 대한 펌프 양정 및 용량을 재 산정하여 적용

· 하절기 소출수 예상지역에 대한 급수구역을 선제적으로 조정하여 대응

급수구역별 적정인구 산정 빅테이터 활용		펌프용량 재산정		급수구역 조정 대응

○ 신림3증압 구역 소·불출수 해소 계획

- 가압장 현황

· 증압장 위치 : 관악구 난곡동 1678-55번지앞(표고 53m)

· 급수수계 : 신림6배수지(표고 98m)

· 급수현황 : 급수세대 1,600세대, 급수인구 4,480명

· 모타펌프현황 : 40HP(양정 30m) 토출량 3㎥/분

- 추진경과

· 빅데이터 분석으로 모타펌프용량 부적정도출 :2014.7.6

· 수계전환으로 소출수 민원해소 : 2014.7.7

- 추진계획

· 추진기간 : 2015. 3월 ~ 6월

· 소요예산 : 130백만원

· 사업개요 : 모타펌프교체(40HP→50

· 추진일정

설계 및 발주 : 2015. 3월

공사시행 및 준공 : 2015. 4월~5월

수계전환 및 통수 : 2015. 6월

□ 기타 공급량 감축계획

○ 재개발 · 재건축 지역 순찰 강화로 선제적 누수방지

- 대상 : 대림1동 재건축 지역외 19개소

- 인입관 폐쇄 완료후 상수도관 누수여부 확인및 순찰로 부정급수 방지

- 노후관(회주철, 아연도강관 등) 탐지강화

※ 정비하지 못하는 노후관에 대하여는 별도 관로도면을 작성 수시 순찰 및 탐지 강화

- 이주 시 즉시 폐전 및 분기점 폐쇄 철저

- 도수 방지를 위한 점검 철저

- 조합과 유기적인 협조 체계를 구축, 공사현장 관리 강화

○ 탐지 및 유량관리 강화

- 취약지역(재래시장,하수암거,지하철역사주변 등)및 누수다발관로 탐지

- 일일공급량 패턴 및 유량감시시스템 분석 강화

○ 갈수기를 이용한 취약관로 주변 하수관로 CCTV탐사

- CCTV임대 : 자치구 임차 사용

- 기간 : 상반기(3~4월), 하반기(10~11월)

○ 대형 관로 by-pass관 누수여부 조사

- 기간 : 상․ 하반기

- 대상 : 136개소

○ 퇴수밸브 정기 점점

- 대상 : 1,480개소(회주철:346개소, 덕타일 및 기타:1,134개소)

- 기간 : 분기별 1회

○ 유량계 비교 검정 조기완료로 정확한 공급량 관리

- 대상 : 35개소(구역유량계  8개소, 중블록 유량계27개소)

- 점검기간 : 2015. 2월 ~ 8월.

○ 과수압지역(감압변 설치지역) 적정수압 유지

- 대상 : 38개소

- 재설치 : 관악구 보라매동

- 월1회 순찰을 실시하여 이상여부 점검조치

※ 관리카드 등 기록 유지

Ⅴ		향후계획

□ 분야별 세부 특별대책 수립 시행

- 공급량 격등지역 등에 대한 빅데이터 자료분석 및 관리

- 소출수 예상지역에 대한 선제적 관리

- 중블록 오류수전 대사 작업등

Ⅵ		행정사항

□ 각 과 유수율 향상 관련 총괄 담당 선정

- 각 과별 신속한 연락체계 구축을 위해 3.5일까지 통보

□ 각 과별 업무추진 협조사항

- 행정지원과 : 소불출수 민원에 대한 데이터 관리

- 요  금  과 : 오류수전 정비

- 현장민원과 : 소출수 민원에 대한 토탈서비스 추진

- 시설관리과 : 담당지역에 대한 유수율 향상 업무추진. 끝.