문서번호	도시철도설비부-8187
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
장병선		강재천	09/04 정찬웅
협 조
	신호과장			김영하
	주무관			민종태
	주무관			오임석
	주무관			최경수

PSD 수동 및 분야간 인터페이스 시험결과 보고

(9호선2단계구간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

PSD 수동 및 분야간 인터페이스 시험 결과 보고

(9호선2단계구간)

9호선2단계구간 PSD에 대해 수동개폐시험 및 분야간 인터페이스 시험을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 시험 근거

○ 9호선2단계구간 종합시운전 계획 (본부장방침, 2014.3.31.)

○ 9호선2단계구간 승강장안전문 종합시험 일정(2014.8.12.)

□ 시험 개요

○ 대  상 : 정거장 5개(상대식, 926~930), 총연장 4.5km

- PSD : 완전밀폐형(2트랙), 가동도어(4문/1량), 비상도어(8문/1량)

- 시운전 차량 : 4량/1편성, ATO운전

○ 기  간 : 2014. 8.25, 8.29 (1.5일간)

○ 참석자(19)

- 본부 기계 담당과장(1), 기계담당(3), 신호 담당(1),

공구별 감리사(4)․시공사(3), PSD제작사(3), 신호 제작사(4)

□ 시험 내용

가. 정거장 선로측에서 PSD 가동/비상도어 수동개폐시험

① 정거장별 선로측에서 수동으로 PSD 가동도어 열림/닫힘 확인

② 정거장별 선로측에서 수동으로 PSD 비상도어 열림/닫힘 확인

※ 비상도어 열림시 승강장 바닥돌에 저촉여부 확인

나. PSD↔신호간 인터페이스 시험

① ATO 연동시험(수동모드) : 전동차 출입문 운전모드는 수동

- 전동차 출입문(4량)과 PSD출입문(4량) 열림/닫힘 확인

② ATO 연동시험(자동모드) : 전동차 출입문 운전모드는 자동

- 전동차 출입문(4량)과 PSD출입문(4량) 열림/닫힘 확인

③ 차량 인터록 시험

- PSD가 열려 있는 상태에서 열차가 승강장에 진입여부 확인

- PSD가 열려 있는 상태에서 정차해 있던 열차가 승강장에서 출발

하는 지 여부 확인

- PSD가 열려 있는 상태에서 승무원조작반의 인터록해제 버튼을

누른 후 닫힘확인이 점등되고 열차가 출발하는 지 여부 확인

④ 수동개폐시험

- 승무원조작반에서 열림버튼을 조작하여 PSD 일괄 열림 동작 확인

▷ 승무원조작반(4량,6량,8량) 개폐버튼을 조작하여 PSD 출입문

(4량,6량) 열림/닫힘 확인

- 전체 PSD가 열리면 기관사조작반 ‘전체열림’ 표시램프가 점등확인

⑤ 열차 정차위치에 따른 연동개폐 확인시험

- 열차를 정위치구간(±350mm)에 정차시킨 후 PSD 전동차도어와         연동하여 개폐되는 지 확인

⑥ 신호기계실에서 임의로 전동차 6량 열림/닫힘 신호에 따른 PSD

출입문(6량) 열림/닫힘 확인

□ 시험 결과

가. 정거장 선로측에서 PSD 가동/비상도어 수동개폐시험

: 가동도어는 전반적으로 양호하나, 비상도어는 일부 조정․보완필요.

연번	시험내용	926		927		928		929		930
		상선	하선	상선	하선	상선	하선	상선	하선	상선	하선
①	가동도어 열림/닫힘 시험	양호	양호	1	1	3	양호	양호	양호	양호	양호
②	비상도어 열림/닫힘 시험	6	5	8	4	4	10	8	6	2	1
	비상도어 승강장 바닥돌에 저촉(개소)	1	4	4	3	양호	4	1	2	양호	양호

※ 세부내용 : 붙임참조

나. PSD↔신호간 인터페이스 시험 : 전반적으로 양호함.

연번	시험내용	926		927		928		929		930
		상선	하선	상선	하선	상선	하선	상선	하선	상선	하선
①	ATO 연동시험 (수동모드)	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
②	ATO 연동시험 (자동모드)	미실시	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
③	차량 인터록 시험	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
④	수동개폐시험	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
⑤	열차 정차위치에 따른 연동개폐 시험	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
⑥	전동차 6량 신호→ PSD 6량 열림시험	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

※ 926정거장 상선은 ATO 연동시험(자동모드) 미실시

→ 상선 925↔926 경계구간에 전동차 시험조건이 안됨.

□ 조치의견

○ PSD 가동/비상도어 미비사항을 감리단에 통보하여 조속한 시

일내에 보완토록하고

○ 비상도어 열림시 승강장 바닥돌 저촉개소는 해당분야(건축부)에

통보하여 조치요청코자 함.

□ 향후계획

○ 9.20 : PSD 가동/비상도어 미비사항 보완(야간작업)

○ 10.30 : 9호선2단계구간 정거장별 PSD 1000회 개폐시험

[시험 전경] : 927정거장(상선)

승무원 조작반	PSD 상선 열림
가동도어 개폐시험	비상도어 개폐시험

붙임 : PSD 수동/비상도어 개폐시험결과 내용 1부. 끝.