의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-4232
보존기간	년
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
장기철		서관석	노우성	형태경	03/02 천석현
협 조
	도로시설계획팀장				한정무
	주무관				오열상

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 352번, 오경환 의원, 기획경제위원회)

시의원 요구자료를 따로붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙  임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

오경환 의원(기획경제위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 352

1. 월드컵대교 건설공사 관련

가. 사업계획서 사본

나. 현재까지 추진 경과 및 향후 계획

다. 예산 확보 및 변동 현황

1. 월드컵대교 건설공사 관련

가. 사업계획서 사본

- 월드컵대교 추진계획(부시장방침 제18호) : 붙임

나. 현재까지 추진 경과 및 향후 계획

1) 추진경과 (공정률 : 21%)

○ '01. 9. ∼ '06.12. : 기본 및 실시계획용역 시행

○ '09. 1.19. : 월드컵대교 추진계획 결정(부시장방침 제18호)

○ '09. 9. 3. : 도시계획시설 변경 결정(서고시 제2009-328호)

○ '10. 3.22. : 공사 착공 (공사기간 : ‘10. 3.22. ~ ’15. 8.22.)

○ '12.10.    : 수상구간 우물통 기초 시공 완료

○ '14.12.    : 북단IC 복합말뚝 완료

○ '14.12.    : 수상구간 교각 하부공 시공 완료

2) 향후 추진계획  ('15년말 목표 공정률 : 26%)

○ '15. 1. : 수상구간 주탑 주두부 시공

북단IC 접속교 및 연결로 교대, 교각 시공

○ '16. 1. : 수상구간 주탑 주탑부 시공

남단 접속교 및 연결로 시공

○ '18.12. : 교량 상부공 시공 완료

○ '20.12. : 개통 및 준공

다. 예산 확보 및 변동 현황

1) 예산투입 현황

[단위 : 백만원]

구 분	총사업비	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
당 초	355,049	16,720	56,500	56,500	70,000	70,000	85,329
변 경	258,858	16,720	10,000	15,000	10,000	10,000	15,000

2) 향후 예산투입 계획

[단위 : 백만원]

구 분	총사업비	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
예 산	258,858	76,720	35,000	40,000	50,000	30,000	27,138

붙 임 : 월드컵대교 추진계획 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시기반시설본부 토목부)	담당사무관	서관석
	☎ 3708-2546	주무관	장기철
	작 성 일 : 2015. 2.27.

이곳에 본문을 입력하세요