문서번호	녹지관리과-1828
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	녹지관리과장		중부공원녹지사업소장
송창선	박병구	김윤철		03/02 이용태
협 조
	★주무관		강병기

한양도성 주변 정비공사 추진계획

2015. 2

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■’
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■’
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■’
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■’
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■’
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■’
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■’

한양도성 주변 정비공사 추진계획

한양도성의 유네스코 세계문화유산 등재 추진과 관련, 남산․낙산 구간의 한양도성 주변 순성길(탐방로)와 수목 등을 정비하고자 함

□ 추진근거

○ 한양도성 순성길(탐방로) 정비(한양도성도감-1803, ‘15.2.25)

○ 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비(한양도성도감-1245, ‘15.2.9)

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 남산(팔각정 배드민턴장 일대), 낙산(전망대)

○ 규    모 : 한양도성 약 2km 주변

○ 사업내용 : 기존 노후 순성길(탐방로) 정비, 담쟁이 및 수목정비

○ 사업기간 : ‘15. 3 ~ 11

○ 사 업 비 : 250백만원(국비 70% / 시비 30%)

- 한양도성보존정비, 한양도성 탐방로조성 및 정비, 시설비 및 부대비   - 200백만원

- 한양도성보존정비, 서울한양도성 수목 및 담쟁이 정비, 시설비 및 부대비 - 50백만원

□ 추진일정

○ ‘15. 3 ~ 06 : 실시설계 용역시행(설계용역타당성, 설계심의 등)

- ‘순성로 정비’와 ‘수목 및 담쟁이 정비’는 같은 성격의 사업이며 설계비가 소액으로, 설계용역은 일괄 발주․시행하고, 공사는 사업별로 시행

○ ‘15. 7 ~ 11 : 공사시행(문화재 감리용역 포함)

□ 행정사항

○ 순성길(탐방로) 정비 가이드라인, 수목 보존관리지침 준수

○ 문화재청 국고보조사업 업무지침에 의거 전문가 자문

○ 공사 발주 전, 최종 설계내역 검토의뢰(녹지관리과→한양도성도감)

첨부 : 사업별 개요 1부 .  끝.

한양도성 순성길(탐방로) 정비사업

□ 대 상 지 : 남산․낙산 구간 400m

□ 정비내용 : 기존 노후 순성길(탐방로) 정비

□ 총사업비 : 200백만원(시설비 198,800천원/시설부대비 1,200천원)

구간	위 치	연장	비 고
남산	팔각정 배드민턴장 YTN 옆	150m	남산체육회 및 팔각정 배드민턴장 철거지 및 주변 순성길 정비
낙산	전망대 주변	250m	낙상 전망대의 과거 방공포대 소개 안내판 설치 및 순성길 주변 수목 등 낙산구간 정비(시장요청 사항)

□ 위치도

남산체육회 철거지

팔각정배드민턴장

철거지

낙산전망대

한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비사업

□ 대 상 지 : 남산 구간 2km

□ 정비내용 : 한양도성 부착 담쟁이 제거, 수목 정비

□ 총사업비 : 50백만원

- 시설비 49,700천원 / 시설부대비 300천원

□ 위치도

한양도성 남산구간(2km)