문서번호	토목부-4198
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	03/02 노우성
협조
	주무관		유근평

공사발주 및 시행계획보고(9차공사)

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사발주 및 시행계획보고(9차공사)

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

우리 부에서 시행하고 있는 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사(9차) 발주 계획에 대한 검토 보고임.

※ 2015년 편성예산 39,559백만원

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7.31.(9차: 착수일로부터 `15.12.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

추진경위

❍ 2002. 07. 03. : 공사착수

❍ 2003. 06. 02. : 공사중단(고가차도 반대민원)

❍ 2003. 11. 19. : 고가차도 지하화 시행방침(부시장 제395호)

❍ 2011. 02. 17. : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2011. 03. 01. : 공사재개

❍ 2014. 09. 16. : 과천시구간 도시계획사업 실시계획 인가고시

❍ 2014. 09. 24. : 구룡지하차도 개통

❍ 2014. 11. 19. : 보상협약 체결(과천시구간)

계약금액 집행현황

구 분	총 괄	기 발주	금회 발주	장래
		1~8차(준공)	9차
계약금액	222,995,000	45,918,500	25,000,000	152,076,500
(금액비율)	100.0%	20.6%	11.2%	68.2%
공사기간	`02.07.03.~ `18.07.31.	`02.07.03.~ `15.02.28.	착공일 ~ `15.12.31.

계약물량 집행현황

공 종			단위	총 괄	1~8차 (기발주)	9차 (금회발주)	장 래
토 공			㎥	488,943	124,560	7,487	356,896
배 수 공			m	4,384	480	1,516	2,388
포 장 공			㎡	201,219	21,086	27,079	153,054
구조물공	본선교량	교각	기	8	2	3	3
		교대	기	1	-	-	1
		강교제작	톤	5,490	1,833	3,657	-
		강교가설	톤	5,490	-	2,546	2,944
		슬래브	m2	13,132	-	6,022	7,110
	주암교	구조물공	m3	6,279	3,160	3,119	-
		H-Pile	본	274	138	136	-
		버팀보	본	280	142	138	-
	화물터미널앞 지하차도	구조물공	m3	60,376	-	-	60,376
		H-Pile	본	1,817	165	622	1,030
		버팀보	본	4,264	-	-	4,264
		복공	m2	20,994	-	9,797	11,197
	제2염곡지하차도	구조물공	m3	26,192	-	-	26,192
		H-Pile	본	1,416	-	304	1,112
		버팀보	본	1,236	-	-	1,236
		복공	m2	-	-	-	-
	구룡 지하차도	구조물공	m3	32,211	32,211	-	-
		H-Pile	본	1,610	1,610	-	-
		버팀보	본	1,207	1,207	-	-
		복공	m2	13,403	13,376	27	-
	대모 지하차도	구조물공	m3	25,184	-	-	25,184
		H-Pile	본	1,725	-	-	1,725
		버팀보	본	678	-	-	678
		복공	m2	12,803	-	-	12,803

공사 발주계획

❍ 공사기간 : 착공일로부터 2015.12.31.까지

❍ 발주금액(9차)

(단위 : 천원)

전 체	1 ~ 8차	금회(9차)	잔 여 분	비고
222,995,000	45,918,500	25,000,000	152,076,500

※ 9차공사 발주금액 : 25,000백만원(재정: 15,000 + 채무: 10,000)

❍ 공사물량 금액(9차공사 : 25,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분		공 사 개 요	공사금액
토 공		- 사토운반(토사 6,718m3, 연암 769m3)	96
배수공		- 원심력콘크리트관 1,516m - 맨홀공 54개소	692
구조물공	본선교	- 강교제작( 제작 3,657톤, 운반가설 2,546톤) - 본선상부공(P3~P5 가시설 및 구조물 시공) - 본선하부공(BR1 슬래브 시공)	9,103
	주암교	- 구조물공(교각2개소, 교대2개소, 상부공) - 가시설(H-pile 96본, 띠장 352m) - 차수공(139m3)	1,921
	화물터미널앞 지하차도	- 가시설(H-pile 622본, 주형보 720본, 복공판 9,767m2) - 차수공(581m3)	4,196
	제2염곡 지하차도	- 가시설(H-pile 304본) - 보강공사(기존 염곡지하차도 보강 19개소)	153
	구룡 지하차도	- 부대공(가시설 해체 1식)	341
포장공		- 포장(보조기층 8,433m3, 동상방지층 9,720m3, 표층 27,079m2)	1,659
조경공		- 수목이식(염곡교차로 구간)	15
기 타		- 제경비, 부대공 등	6,824

검토･조치의견

❍ 2016년 5월 강남순환도시고속도로 민자구간 개통에 대비 민자 접속구간의 주암교 및 본선교량을 우선 시공할 수 있도록 위와 같이 9차공사를 발주․시행하고자 함.

붙 임  1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계서 1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.