투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	납품기한(분뇨이송펌프) 연장 의뢰

슬러지재활용과-7728(‘14.12.16)호 “계약의뢰(분뇨 유입저류조 증설공사 분뇨이송펌프 구매)” 및 관리과-45(’15.1.6)호 “계약체결통지(분뇨 유입저류조 증설공사 분뇨이송펌프 제조구매 설치)와 관련하여 납품기한의 연장을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상물품 : 분뇨이송펌프

나. 사    유 : 준공기한 연장(설치시기 미도래)

다. 납품기한

• 변경전 :  ‘15.03.30

• 변경후 :  ‘15.06.15

라. 계약업체 : ㈜지텍(대표 박미영). 끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	03/02 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-1534	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개