문서번호	시설과-1534
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
이재미	국중연	박형중		03/02 강홍빈
협 조

경희궁 후원(조경) 정비 계획

2015. 3.

경영지원부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	문화재청, 종로구청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

경희궁 후원(조경) 정비 계획

경희궁 후원에 꽃이 피고 낙엽이 아름다운 수목을 추가 식재하고 보호시설물앞 경계울타리식재를 통하여 방문 시민들에게 아름답고 안전한 고궁 환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 위    치: 종로구 신문로2가 2-1 경희궁지(사적 제271호)

□ 규    모: 약 600㎡

□ 조경현황

○ 식재현황: (교목) 매화나무 외 1종 12주

(관목) 모란, 매자, 철쭉 등

(지피) 구절초 등 7종

○ 시설현황: 화계 1개소

Ⅱ		문제점 및 추진방향

□ 화계 식재 볼륨감 부족하여 밋밋하고, 상록수 부재로 겨울철 황폐한 경관 연출

⇒ 큰나무 등 추가식재로 다층 식재구조 형성 및 상록초화 추가 식재

□ 서암 주변 풍화작용으로 지속적인 토사 유실

⇒ 지피식물 피복 식재로 토사 유실 최소화, 식재가능공간 수목 추가 식재

□ 자정전 우측 낮은 보호시설물(휀스)에 의한 방범 취약지역 보완 필요

(2014. 12. 21. 외부인 월담 침입 사건 발생)

⇒ 휀스 앞 대관목 울타리 식재 등으로 보안 강화 및 경관 향상

Ⅲ		추 진 계 획

□ 대 상 지: 경희궁지 후원(자정전 우측 담장부, 자정전 후면 화계, 서암주변)

□ 기    간: 2015. 3. ~ 5.

□ 주요 추진내용

○ 자정전 우측 담장부 명자나무 400주 울타리 식재, 줄사철 9㎡ 식재

○ 화계 교목(산수유 3주), 관목(황매화 30주), 상록지피(맥문동매트 7㎡) 추가 식재

○ 서암주변 지피(줄사철매트 25㎡), 산수유 3주, 황매화 외 1종 290주 추가 식재

1지역

(자정전 우측

담장부)

2지역(화계)

3지역(서암)

□ 방    법: 도급 공사 시행

□ 소요예산: 19,800천 원

○ 예산과목: 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관 유지·운영

일반운영비, 공공운영비

Ⅳ		행 정 사 항

□ 2015. 3. 2.~ 3.: 계획수립

□ 2015. 3. 4.: 문화재 현상변경 허가 신청(박물관→종로구청→문화재청)

※ 문화재청 매월 둘째주 수요일 심의위원회 개최(3월은 3.11. 개최 예정)

□ 2015. 3. ~ 4. : 공사발주

□ 2015. 4. ~ 5. : 공사시행 및 준공

붙 임:  문화재 현상변경 신청서 1부.

책임운영기관 성과지표  13.관람환경의 적정성

14.고객만족도