문서번호	시설보수과-1625
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	03/02 조병준
협 조

“ 2015년도 ”

도로시설물 일상유지보수공사 추진계획

2015. 02.

강서도로사업소

(시설보수과)

2015년도 도로시설물 일상유지보수공사 추진계획

우리사업소에서 관리하고 있는 도로시설물에 대하여 각종 안전점검(진단, 정밀점검, 정기점검 등)시 지적사항에 대한 보수 우선순위를 검토하여 2015년도 일상유지보수공사 예산을 효율적으로 추진하고자 함

Ⅰ		관련문서

❍ ’15년 도로시설물일상유지보수공사 예산 재배정 계획 : 도로시설과-475호(2015.1.13)

❍ 2015년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사 예산 재배정 계획 알림

: 교량안전과-774호(2015.1.20)

Ⅱ		도로시설물 현황

□ 도로시설물 : 총 57개소

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	57	18	7	6	17	5	4
1 종	7	-	-	-	2	4	1
2 종	22	7	4	2	8	1	-
법정외	28	11	3	4	7	-	3

Ⅲ		예산 현황

□ 일상유지보수 예산                            (단위:백만원)

구 분	예산액	서울시 담당부서	비 고
계	2,709
교량, 고가, IC	1,260	교량안전과
터널, 복개, 지하차도, 세척	1,449 (세척:478)	도로시설과	시설물 세척비용 478백만원 포함

Ⅳ		세부추진계획

□ 일상유지공사 시행방법

❍ 2015년 일상유지보수 배정된 교량, 고가 및 터널, 지하차도, 복개구조물

예산을 통합하여 발주 시행

- 예산액 : 2,231백만원

(교량,고가,IC : 1,260백만원,  터널,복개,지하차도 : 971백만원)

❍ 도로시설물 세척은 별도 발주 시행 : 478백만원

□ 보수대상 선정기준

❍ 각종 안전점검(정밀진단, 정밀점검, 정기점검, 특별점검)시 지적된 내용중

1순위 보수대상

❍ 각종 안전점검시 지적된 내용중 2순위중 보수가 필요한 대상

❍ 2015년 단위사업으로 시행중인 시설물은 원칙적으로 제외하고, 미조치되는 사항에 대하여 필요시 보수 시행

※ 단일공사 세부내역

연번	사 업 명	사 업 내 용	예산액 (백만원)	비고
합 계	5 건		13,587
1	목동교(구교) 성능개선공사	바닥판교체:B=20.4m, L=240m 하부구조 보수·보강 등	10,831	도기본 공사시행
2	서울교 보수공사	교면방수 및 재포장, 기타보수 등	1,023
3	도림천복개(좌안) 보수공사	교면방수 및 재포장, 콘크리트 단면보수 등	983
4	고척2지하차도 보수공사	아스콘포장, 단면보수, 누수보수, 균열보수 등	450
5	외발산지하차도 보수공사	아스콘포장, 단면보수, 신축이음보수 등	400

❍ 기타 시설물 안전을 위하여 필요한 사항

□ 시설물별 보수물량 : 별첨

□ 추진일정

❍ 2015.2.16 : 설계도서 작성 및 계약심사 요청

❍ 2015.3. 3 : 공사발주(계약의뢰→서울시 재무과)

❍ 2015.3.17 : 공사 계약 및 착공

❍ ~ 2015.12 : 공사추진

따로붙임 : 2015년 일상유지보수공사 보수물량 1부.   끝.