문서번호	도로보수과-1064
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
한수영		김승태	03/03 민승기
협 조
	주무관			박영권

2015년 포장도로 유지보수공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

남부도로사업소

도로보수과

2015년 포장도로 유지보수공사 시행계획

2015년 노후포장도로 정비예산이 재배정 됨에 따라 포장도로유지보수 공사를 발주하여 혹한으로 동결 파손된 노후포장도로 정비로 안전사고 예방과 쾌적한 도로환경 조성에 만전을 기하고자 함.

■ 근 거 :

○ 포장도로 정비예산 재배정(7,933백만원) - 도로관리과-2546(‘14.2.17)

- 노후포장도로 정비공사 재배정예산 - 4,437백만원

- 버스전용차로 정비공사 재배정 예산 –  1,100백만원

- 도로파손 긴급복구공사 재배정 예산 –  1,896백만원

- 불량맨홀 정비공사 재배정 예산 - 500백만원

■ 사업현황

○ 사업기간 : 2015. 3.  ~ 2015. 12. 30

○ 예    산  : 7,933백만원

○ 보수대상 : 16노선 26개소 2,029a(긴급복구 및 직영보수 별도)

- 노후포장     : 13노선 21개소 1,770a

- 버스전용차로 :  3노선  5개소 259a

■ 추진방향

○  포장공사 공종별 분리 · 통합 발주

- 재배정 예산에 따른 “도로파손 긴급복구공사” 별도 발주

→ 안전사각지대 정비물량 반영 정비추진

- 재배정 예산에 따른 “버스전용차로 정비공사” 별도 발주

→ 개질아스팔트 사용으로 전용차로 소성변형 방지

- 노후포장유지예산 재배정에 따른 효율적 추진을 위해 “2015년 포장도로 정비공사 2개지역 분리발주〔A구역(서초,동작), B구역(관악,금천,영등포)〕

○  성과관리 목표 및 재생아스콘 의무사용(30%) 반영

- 포장도로 유지보수공사에 재생아스콘 30% 의무 반영

- 일반포장 자재는 소성변형에 강한 #67 아스콘(1등급) 사용

○  차선도색공사 분리 발주

- 고휘도 도료 사용 - 일반시도(전용도로포함) 및 원인자부담공사

(※ 도로기준100m이내 주변과 동일한 재료로 도색실시)

○  폐아스콘 처리

- 포장구간내 폐아스콘처리는 운반비 반영(처리비 무대)

- 직영 폐아스콘 처리는 제일아스콘 무대 협약체결

○ 직영반 자재구매

- 소규모 포장보수 및 소파보수 자재 등 구입

■ 세부추진방향

○ 현장조사 : 2015 1. 1 ~ 2. 28(조사완료)

○  물량산출 및 설계서 작성 : 2015. 3. 1 ~ 3. 10

-  도시안전실 포장도로 공통대가 확정에 따른 설계반영

-  조달청 2015년  원가계산 제 비율 반영

-  노후포장도로 재배정 예산에 맞춰 설계물량(시공 및 자재량) 확정

○  계약심사의뢰 및 발주 : 2015. 3. 10 ~ 4. 20.

-  도로파손 긴급복구공사 (심사 : 2015. 3. 3.    발주 : 2015. 3. 10)

-  버스전용차로 정비공사 (심사 : 2015. 3. 10.   발주 : 2015. 3. 20)

-  포장도로(A·B구역)보수공사(심사 : 2015. 3. 10. 발주 : 2015. 3. 20)

■ 예산 활용 및 발주 계획                                 (백만원)

사 업 명	예산액	발 주 계 획(2015년)				담당자	비 고
		발 주 금 액	발 주 예 정	착 공 예 정	준 공 예 정
계	7,933	7,933
긴급복구(연간단가)	1,896	1,400	3.10	3.20	‘15.12.20	한수영
버스전용차로정비	1,100	1,000	3.20	4. 1	‘15.12.20	한수영
포장도로유지(A구역)	2,218	1,800	3.20	4. 1	‘15.12.20	조경현
포장도로유지(B구역)	2,219	1,800	3.20	4. 1	‘15.12.20	조경현
불량맨홀정비	500	500	3.27	4. 7	‘15.12.20	박영권
포장구간 차선도색		600	4.10	4.20	‘15.12.20	조경현
차선도색 감리 및 설계용역		30	4.10	4.20	‘15.12.20	조경현
폐기물 처리용역		500	3.10	3.20	‘15.12.20	정철식
직영자재비(긴급복구자재비 포함)		303	-			김형갑

붙 임 : 2015년 노후포장도로 정비대상(버스전용차로포함) 1부. 끝.