문서번호	산지방재과-2174
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	사면총괄팀장	산지방재과장		푸른도시국장
이승동	김상국	김영수		전결 03/03 오해영
협 조
	주무관		황의석

2015. 학술용역 시행계획

우면산 산사태 복구지와 주변지역 생태환경 모니터링 연구

2015. 2.

푸 른 도 시 국

(산지방재과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	계약심사 대상	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015. 학술용역 시행계획

우면산 산사태 복구지와 주변지역 생태환경 모니터링 연구

우면산 사방시설과 주변생태와의 변화 관찰 및 향후 관리방안 수립을 위한 학술용역 모니터링 연구를 추진함에 있어 제안서 평가에 의한 전문 연구기관을 선정하여 시행코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 시장님 지시사항(2014. 4. 25) - 우면산 현장방문 시

- 사방공사 완료후 지속적으로 모니터링하여 보완 및 개선방안을 발굴바람

○ 우면산 산사태 복구지역 생태변화 모니터링 학술용역 방침(산지방재과-8065)

Ⅱ		추진개요

○ 용 역 명 : 우면산 산사태 복구지와 주변지역 생태환경 모니터링 연구

○ 용역범위

- 과업기간 : 착수일로부터 24개월간

- 대 상 지 : 서초구 우면산 일대【서초동, 우면동, 방배동】

○ 소요예산 : 180백만원

○ 추진경위

- 2014. 8. 19 : 우면산 산사태 복구지역 생태변화 모니터링 학술용역 계획(안)방침

- 2014. 8. 22 : ‘15년도 푸른도시국 학술용역 자체심사

▶ 심의결과 : 적정(참석위원 전원 동의)

- 2014. 9. 26 : ‘15년 정기 학술용역 심의(조직담당관)

▶ 심의결과 : 적정(사업비 조정 200백만원 → 180백만원)

○ 용역내용

- 우면산 사방시설지 및 주변지역 동․식물 현황 조사

- 사방시설로 인한 생태계 구조와 기능에 영향을 미치거나 위협될 요인 분석

- 사방시설과 생태계의 상호보완 및 향상방안 도출

- 우면산 복구지역 관리 종합계획 및 서울형 사방시설과 연계한 관리방안 제시

Ⅲ		시행계획

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

○ 입찰자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제13조 및 같은법         시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체로서,

- 생태관련 학과가 설치되어 있는 대학(교), 대학원(산학협력단, 부설연구기관         등 포함) 또는 자연환경 복원 또는 생태분야 연구를 목적으로 민법 기타          법령에 의해 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인이 주체로서

- 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제3조의 규정에 의한 건설         부분(조경)의 엔지니어링 사업자신고를 필한 업체와

- 기술사법 제6조에 의거 산림기술사 사무소를 개설등록한 업체와 3자 공동도급

○ 평가방법

- 연구제안서를 제출받아 제안서 평가기준에 따라 기술능력평가와 입찰가격         평가에 대하여 종합평가를 실시하여 우선 협상 대상자를 선정

- 평가항목 및 배점 : 총100점

▶ 기술능력평가 : 80점(정량적 평가 20점, 정성적 평가 60점)

▶ 입찰가격평가 : 20점

- 제안서 평가기준 : 따로붙임(제안요청서) 참조

▶ 제안서 평가는 공정한 기술능력평가(정성적 평가)를 위하여‘제안서 평가            위원회’를 구성하여 평가

- 제안서 평가위원회 선정은 구성인원의 3배수 이상을 예비 평가위원으로          선정하고 위원별 고유번호를 부여하여 추첨에 의거 위원 결정

○ 선정절차

입찰공고	⇒	입찰등록 및 제안서 제출	⇒	제안서 평가	⇒	협상대상자 선정 및 통보	⇒	협상 및 계약체결

Ⅳ		추진일정

○ ‘15. 3. : 용역 발주, 계약심사 및 공고(20일간)

○ ‘15. 4. : 제안서 평가위원회 개최 및 우선협상 대상자 선정

○ ‘15. 4. ~ ’17. 2 : 학술용역 시행

일 정 항 목	2015									2016												2017
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
과업계획, 대상지 현황 조사 등
식물 생태계 조사 및 분석
동물 생태계 조사 및 분석
사방시설의 기능과 상호영향 분석
생태계보전과 향후 향상방안 도출
중간보고(1차 ~ 4차)
1차년도 결과보고서 작성
토론회 및 공청회
2차년도 결과보고서 및 최종보고서

따로붙임 : 제안요청서 1부.  끝.