함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2015년 배급수관 정비사업 구간 변경(일부) 보고

1. 본부 누수방지과-341(2015.1.13.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 「독산동 194-4번지외 3개소 배급수관 정비공사」계획구간 관상태를 확인결과(천공) 일부구간이 내식성관으로 확인되어(첨부1. 참조) 아래와 같이 위치를 변경하여 공사를 시행코자 하오니 검토 회신바랍니다.

연 번	당 초		변 경		비고
	위치	공사개요	위치	공사개요
1	독산동 194-4~7	D=200mm L=95m	독산동 883-9	D=80mm L=60m
2	독산동 195-2~7	D=200mm L=115m	청룡동 1539-11~20	D=100mm L=130m

첨부 :  1. 배급수관 정비공사 공사구간 변경계획 1부.

2. 배급수관 정비공사 구간 관상태 확인굴착 결과 및 조치계획 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최선보		주무관	代박장진		급수운영과장	전결 03/03 장시명
협조자
시행	급수운영과-3431	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	대시민공개