투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	(강남공사관리처)
제목	개봉고가 토공구간 옹벽 표면보수 검토 시행 지시(2014년 개봉고가차도 보수공사)

1.“2014년 개봉고가차도 보수공사-강서”와 관련입니다.

2. 개봉고가 시·종점부 토공구간 옹벽구간의 환경개선 요청〔개봉제2동-1541호(‘15.2.10), 구로구 도로과-6066호(’14.5.16)〕관련, 옹벽 콘크리트 표면보수를 본 공사에 포함 시공되도록 하고, 광명측 시점부(A1) 상·하행선, 개봉측(A2) 하행선 옹벽 콘크리트 표면보수는 주간 교통통제가 어려운 경우 야간작업 시행을 검토하시기 바라며,

3. 물량증가에 따른 추가비용은 도급비 범위내에서 설계변경에 반영될 수 있도록 조치 바랍니다.

붙임 : 현황사진(토공구간 옹벽 작업여건).  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	류춘광		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	03/03 조병준
협조자
시행	시설보수과-1632	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1) 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/	rckng@seoul.go.kr	/	대시민공개