투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 연기 승인 통보(영등포구 당산동5가 5-1번지 당산SK V1 Center 신축공사 주변)

1. 당산동지식인산업센터 당산 SK V1 Center 신축공사 제15-142(2015.2.28.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1)공사명 : 영등포구 당산동5가 5-1번지 당산 SK V1 Center 신축공사 주변

교통안전시설물 설치공사

2)원인자 : 당산동지식인산업센터

************************

3)시공사 : 미래월드안전㈜

4)공사기간

- 당초 : 2015.01.27.~2015.02.28

- 변경 : 2015.01.27.~2015.03.31

5)감리사 : ㈜대영유비텍

3. 연기사유 : 디자인지주 제작지연으로 인한 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	당산동지식인산업센터 당산SK V1센터 신축현장 대리인,대영유비텍(주) 책임감리원
★주무관	양상규		기전과장	03/03 박재경
협조자
시행	기전과-2637	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개