내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역준공기한 연기 의뢰

우리부서에서 시행 중인 용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용역명 : 용산 지구단위계획(서부 이촌동) 재정비 용역

- 용역기간 : 2014. 5. 9. ~  2015. 3. 8.

- 계약금액 : 일금이억삼천만원정 (₩230,000,000)

- 계약자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소(대표 최태희) 외 1

나. 준공기한 연기내용

- 당초 : 2014. 5. 9. ~  2015. 3. 8.

- 변경 : 2014. 5. 9. ~  2014. 9. 8.

다. 연기사유

- 현재 검토안을 가지고 주민설명회 및 간담회를 시행하는 등 지속적으로 주민들과 협의 중이나 추가적인 논의 과정 필요

- 주민협의를 거친 합리적인 도시관리계획 수립을 위해 추가공기가 필요함에 따라 준공기한을 연기하여 지구단위계획 수립에 만전을 기하고자함.

붙임  1) 준공기한연기 보고서 1부

2) 준공기한연기 의뢰서 1부

3) 합의각서 1부(별도송부).    끝.

	도시관리과장
주무관	이영욱		도시관리계획팀장	신현석		도시관리과장	03/03 안재혁
협조자
시행	도시관리과-3141	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15 덕수궁길 15	/
전화	(02)-2133-8385	/전송	(02)-2133-0738	/		/	대시민공개