문서번호	문화예술과-3280
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	문화진흥팀장	문화예술과장		문화체육기획관
이훈영	장철민	김혜정		03/03 양현미
협 조

영등포문화원 시설개선(주민참여)

사업계획 승인 및 시비보조금 교부계획

2015. 3.

문화체육관광본부

(문화예술과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	서울시주민참여예산제운영조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	영등포구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

영등포문화원 시설개선(주민참여)

사업계획 승인 및 시비보조금 교부계획

영등포문화원에 승강기를 설치하여 장애인, 노인, 임산부 등 이동 약자들의 문화 활동 참여와 문화 복지 증진에 기여하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 지방문화원진흥법 제3조(지방문화원의 육성 등)

❍ 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

❍ 서울특별시 보조금 관리조례

□ 사업목적 및 필요성

❍ 장애인, 노인, 임산부 등 신체적 약자를 위한 승강기를 설치하여 시민 문화활동 참여와 문화복지 증진에 기여

❍ 건물 시설개선으로 영등포문화원 사업 활성화 유도

□ 추진계획

❍ 사 업 명 : 영등포문화원 시설개선(주민참여)

❍ 사업기간 : ‘15. 3 ~ 12월

❍ 위    치 : 영등포구 신길로 275 영등포문화예술회관

❍ 건물현황

- 규    모 : 연면적 3,356.83㎡(지하1층, 지상3층)

- 운    영 : 108개 강의 운영

- 이    용 : 하루 300여명 이용(약 80%가 어르신)

❍ 사업내용 : 영등포 문화원 엘리베이터 1대 설치

❍ 추진방법 : 시비 보조금 교부(시 → 영등포구) 후 공사발주

❍ 소요예산 : 350,000천원(자치단체자본보조)

(단위 : 천원)

구 분	항 목	산출내역	예 산 액
			계	시 비	자치구비	자부담
문화원 엘리베이터 설치	계	350,000
	안전진단비	10,000	10,000	10,000
	설계비	○ 공공발주사업에 대한 건축사 대가기준 (공사비 6.34%)	18,000	18,000
	감리비	○ 공공발주사업에 대한 건축사 대가기준 (공사비 1.54%) ○ 소방공사 별도 감리대가 기준 적용	8,688	8,688
	공사비	○ 엘리베이터설치(48㎡ 증축) : 191,312천원 - 48㎡×2,944천원 = 141,312천원 - 엘리베이터(13인승) = 50,000천원 ○ 엘리베이터 설치에 따른 각 층 개보수(60㎡) : 72,000천원 - 15㎡×4층×1,200,000원 ○ 엘리베이터 지반 보강공사 등 : 40,000천원 ○ 이설비(시설분담금) 등 부대비용 : 10,000천원	313,312	313,312

Ⅱ		사업계획 승인 및 예산교부 계획

□ 사업계획 승인

❍ 사업비 교부조건(붙임2)을 준수하는 조건으로 영등포문화원 시설개선
사업을 승인하고 시비보조금을 교부함

□ 시비보조금 교부 계획

❍ 집행 금액 : 350,000천원

❍ 집행 시기 : 2015. 3월 초

❍ 예산 과목

- 문화예술과, 문화예술진흥, 문화예술 육성지원, 영등포문화원 시설개선(주민참여), 자치단체자본보조(403-01)

Ⅲ		향후계획

❍ 시비 보조금 교부(시 → 영등포구)        : ‘15. 3월

❍ 영등포구 사업진행(실시설계, 공사발주 등) : ‘15. 4 ~ 7월

❍ 공사 착공 및 준공                      : ‘15. 8 ~ 11월

❍ 시비 정산보고 등                       : ‘15. 12월

붙임 : 1. 주민참여예산사업 보조금 교부 신청서(영등포구) 1부

2.『영등포문화원 시설개선』사업 예산 교부조건 1부

3. 사업 실적보고서 1부.  끝.