투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(구조물 기초 줄파기 정산 실정보고 재검토)

1.업무지시현장 :  구리암사대교 건설공사 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2015-03-03

3.지 시 내 용

가. 암사감리 2015 - 106호(2015.2.24.)와 관련입니다.

나. 위 호로 구조물 기초 줄파기 정산 실정보고 사항에 대해 다음과 같이 재검토 지시하오니 관계규정 등을 면밀히 검토한 후 2015.3.6.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 검토사항

- 실적공사비(100%) 단가 재검토

※ 개정된(2014.1.10.)공사계약일반조건 제20조제3항2호 규정에 의해 실적공사비(100%)단가를 적용 하였으나 부칙 제2조 규정에 의하면 시행일은 2014.1.10.부터 시행하도록 규정하고 있으나 이 예규는 시행일 이후 입찰공고를 한 부분부터 적용토록 하고 있음.

- 되메우기 적용 단가 재검토.    끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							한병찬			광역도로과장					03/04 진재섭
협조자
시행			토목부-4342									(						)		접수											(						)
우	100-744					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11층~15층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3078-2557						/전송			02-3708-2599					/	bchan1005@seoul.go.kr												/	대시민공개