문서번호	소방행정과-2747
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김선도	김상엽	김성준		03/04 김재병
협 조

2015년 마포소방서 청사보수공사 기본계획

(염리, 서교, 공덕119안전센터)

소 방 행 정 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 마포소방서 청사보수공사 기본계획

청사 보수·보강을 통한 재산관리 및 청사근무환경 유지에 만전을 기하여 소방서비스 제공을 위한 기반을 마련하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□  소방행정과-773(2015.01.20.)호「2015년도 세입·세출예산편성 결과알림」

□  소방행정과-10172(2014.07.30.)호「2015년도 예산편성요구서(사업별 설명서) 제출」

Ⅱ		일 반 현 황

□	사업대상	:	염리,서교,공덕119안전센터 청사
□	사업기간	:	2015. 3. 05. ~ 2015. 5. 15. (2개월)

부 서	위 치	건 물 개 요		준 공 년 월
		층수	연면적(㎡)
염리 안전센터	마포구 토정로37길 27 (염리동)	3/1	869.52	2004.05.12. (신축)
서교 안전센터	마포구 양화로 60 (서교동)	5/1	770.91	2008.08.08. (신축)
공덕 안전센터	마포구 만래재옛길 82 (공덕동)	3/1	628.84	1990.11.30. (2005.06.13.) (증축)

Ⅲ		예 산 현 황

□ 소요예산 : 금89,900,000원 (금팔천구백구십만원)

○ 설계용역비 : 금4,900,000원 (금사백구십만원)

- 산출근거 : 건설기술용역 직선보간법 적용

【 6,699,545원 × 1.1(부가세) = 7,369,500원 × 80%(개보수) = 5,895,600원 5,895,600원 × 83.11% = 4,900,000원 】

※ 서울시 기술심사과 설계심사시 요율변경으로 인한 설계비 수정가능

○ 공사비 : 금85,000,000원 (금팔천오백만원)

- 건축공사 : 49,570,000원

‣ 재료비(13,483천원), 노무비(21,141천원), 제경비(14,946천원)

- 설비공사 : 35,430,000원

‣ 재료비(16,198천원), 노무비(10,874천원), 제경비(8,358천원)

【 2015년 예산배정 현황 】

(단위: 천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계				134,130
	시설비			134,130
	공덕119안전센터 보수보강공사			25,000
	염리119안전센터 방수공사			40,000
	소방청사 처우개선 사업			39,130
	현장대응단 사무실 설치공사			30,000

※ 예산과목 :직무환경개선_보수보강공사_시설비

Ⅴ		사 업 내 용

□ 염리119안전센터

〇  규    모 : 옥상 방수 및 지하실 (바닥 트렌치 및 누수배관 교체) 보수공사

〇  사업기간 : 2015.04 ~ 2015.05

-  사업내용 :

‣ 지하1층 천정 누수배관(난방 및 오수) 철거 및 배관 교체

‣ 지하1층 바닥 우레탄방수 및 OPEN트렌치(W:100,150) 신설

‣ 지붕층 우레탄 도막방수 및 사다리설치, 바닥 슬라브 주변 우레탄폼 충전

‣ 강화유리문 신설(1층 구급대기실 화장실 및 3층 샤워실) 및 3층 누수천장 방수등 마감처리

옥상(132㎡) 바닥 방수 미처리로 인한 누수현상

지하실 바닥(63.92㎡) 누수 및 노후배관

□ 서교119안전센터

〇  규    모 : 5층 옥상층(하늘마당) 우수배관 보수공사

〇  사업기간 : 2015. 04. ~ 2015. 05.

〇  사업내용 : 5층 하늘마당 바닥 우수배관 선홈통 일부 수정 및 방수공사

우천시 바닥배수 불능

□ 공덕119안전센터

〇  규    모 : 청사 노후배관 교체 및 화장실 환경개선 공사

〇  사업기간 : 2015. 04. ~ 2015. 05.

〇  사업내용 :

‣ 1층 사무실 : 천정 텍스 및 벽면 수성페인트 시공, 기존 라지에타 철거

‣ 1층 ~ 3층 화장실

바닥 액체방수 및 논슬립 자기질타일 시공, 소변기 스크린 시공, 대변기 신설, 방습거울 신설, 천정판 및 LED조명, 화장실 칸막이 신설

‣ 2층 탈의실 및 샤워실 : 샤워수전 및 LED조명 신설 , 세면기 신설

‣ 1층 ~ 3층 PVC 오배수배관 철거 및 배관설비 신설

화장실 노후으로 인한 악취 및 누수

노후배관으로 인한 누수

Ⅵ		사 업 추 진 방 법

□  추진절차

〇  시행절차

- 예산편성 ⇨ 기본계획 ⇨ 설계(서울시 기술심사과 설계검토) ⇨ 공사입찰 및 계약 ⇨ 공사시행 ⇨ 준공검사 ⇨ 사업완료

〇  계약체결

- 설계용역 : 소방행정과 법인신용카드 집행

‣ 지방자치단체 세출예산 집행규정 「신용카드 및 현금영수증 사용요령」에 따른 설계도서 납품검수후 소방행정과 법인신용카드 결재

- 시설공사 : 전자입찰

‣ 단년도 계약

‣ 전자공개 수의계약 (지역제한 : 서울시, 자격제한 : 시설물유지관리업)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조「건설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원 이하의 공사」규경에 의거 낙찰율 87.745%이상 견적제출 낙찰업체와 국가종합전자조달(g2b)프로그램 활용「전자공개수의계약」체결

Ⅶ		추 진 일 정

□	기본계획	:	2015. 3. 5.
□	설계용역	:	2015. 3. 15. ~ 2015. 3. 25.
□	기술심사		2015. 3. 25. ~ 2015. 4. 01
□	입 찰 공 고	:	2015. 4. 02. ~ 2015. 4. 10.
□	시설공사	:	2015. 4. 15. ~ 2015. 5. 10.
□	사업완료(준공)	:	2015. 5. 15.

Ⅷ		기 대 효 과

□	청사시설 안전 확보 및 공공재산 보호
□	청사 보수‧보강공사로 업무효율성 제고 및 쾌적한 근무환경 조성
□	청사시설 보호를 통한 선진 소방서비스 기반마련