문서번호	시설과-665
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	03/04 이춘희
협 조

「2015 응봉공원 시설물 정비공사」

실시설계 자체 시행 계획

2015. 3

동부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

「2015 응봉공원 시설물 정비공사」

실시설계 자체 시행 계획

2015년 응봉공원 시설물 정비공사에 대한 실시설계를 자체 시행하여 전문성 향상 및 예산절감에 기여 하고자함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2015 응봉공원 시설물 정비공사

○ 기    간 : 2015. 2. ~ 5.

○ 사 업 비 : 203,000천원

○ 사업내용 : 게이트볼장 리모델링 등 3건

- 게이트볼장 바닥정비(지반정비, 경계재 설치, 인조잔디 3면 1,080㎡)

- 테니스장 코트 바닥 균열 정비(3개소 약30m)

- 산책로 정비(칼라아스콘 포장 약 350m)

□ 추진사항

○ 2015. 2. 2. : 사업계획 수립(서울숲공원)

○ 2015. 2. 23~27 : 현장조사 및 설계자료 수집(시설과)

□ 실시설계 시행계획

○ 시행기간 : 2015. 2. ~ 3.13.

○ 시행방법 : 실시설계 자체 시행

○ 설 계 자 : 윤유환(현장조사, 자료수집), 최종성(설계서 작성 등)

○ 주요내용

- 응봉공원 현장 및 인조잔디 자료조사

- 설계도서(도면, 내역서, 시방서 등) 작성

□ 예산절감액 : 12,269천원

○ 설계용역 발주시 12,269천원 소요되나, 자체설계하여 예산절감

※ 용역비 산출내역 참고

□ 향후계획

○ 2015. 3. 13 : 실시설계 완료

○ 2015. 3. 16 : 공사 발주

○ 2015. 4. ~ 5. 31 : 공사 시행

붙 임 : 예산절감액(설계용역비)산출내역. 끝.