문서번호	도시철도계획부-1831
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
정원영		김진팔	03/04 박상돈
협조	주무관		김현기
	주무관		한승균

구일역 서측출입구 추가설치 관련

서울지방국토관리청 업무협의 결과보고

2015. 3

도시철도계획부

구일역 서측출입구 추가설치 관련

서울지방국토관리청 업무협의 결과 보고

고척 돔구장 개장(‘16.3)에 맞춰 구일역 서측출입구 추가 설치공사를  한국철도공사에서 위탁시행하고 있으나, 하천점용허가를 득하지 못해 공사 추진이 안돼 개장에 막대한 차질이 우려되므로 우리본부에서 하천점용허가 업무협의한 결과를 보고 드림.

개  요

○ 건   명 : 구일역 서측출입구 추가설치 관련 하천점용허가 업무협의

○ 협의일시 : ‘15.1.26 ~ 2.27 까지  20회 방문협의

○ 협의자

- 서울지방국토관리청 : 국장 이해영,하천계획과장 이호상, 김태진, 이승호주무관

- 도시기반시설본부 : 계획과장 김진팔, 정원영, 김현기, 한승균주무관

○ 협의내용 : 안양천, 목감천 하천점용허가 관련 자료 및 현장 설명

주요 추진경위

○ ‘15.01.11 : 하천점용허가 신청에 따른 보완요구(국토관리청→철도공사)

○ ‘15.01.26 : 안양천, 목감천 하천점용허가 신청현황 현장 설명(1차)

- 서측출입구 구조물 설치계획, 공사용 가축도 설치, 장비점용면적, 우회도로 설치 방안 등 현황 설명(서울지방국토관리청 : 김태진, 이승호주무관)

○ ‘15.02.06 : 하천점용허가 보완자료 방문 협의(4차)

- 점용면적(영구,일시), 구조물설치계획, 공사용가축도 설치도면, 장비작업장 위치등 전반적인 현황 설명

- 국토관리청(1차) :  보완요구사항

▸ 평시 목감천 수위상승에 따른 가도관리계획, 공종별 원상보구계획서,      연결통로 기둥과 자전거도로 여유폭 도면에 표기할 것 등

○ ‘15.02.09 : 하천점용허가 보완자료 작성하여 방문 협의(7차)

- 보완자료 설명 및 자료제출

- 국토관리청(2차) : 보완자료 요구

▸ 안양천과 합류되는 목감천 가축도 우기철 전이라도 수위상승에 따른 작업중지 등  단계별 관리계획서 및 원상복구 계획서

▸ 평수위, 가축도 높이, 안양천 홍수위등을 도면에 명기하여 제출할 것.

○ ‘15.02.10 : 하천점용허가 보완자료 작성하여 방문 협의(14차)

- 보완자료 설명 및 자료 제출후 우기철 교각공사를 완료하기 위해서는 공사기간이 촉박하므로 조속히 하천점용허가 처리 당부

- 국토관리청(3차) : 보완자료 요구

▸연결통로 기둥설치에 따른 자전거도로 측방거리(각0.25m)를 포함하고, 자전거도로 폭 3.0m 이상 확보할 것.

▸예정공정표에 원상복구 계획서가 누락되어 있으니 보완할 것.

○ ‘15.02.11 : 하천점용허가 보완자료 작성하여 방문 협의(15차)

- 보완자료 설명 및 자료 제출후 국토관리청에서 보완요구한 자료 전부 제출하였으나 조속히 하천점용허가 처리 당부

⇒ 국토관리청 의견 : 공사의 시급성을 알고 있으므로 조속히 검토후 조치 계획임.

○ ‘15.02.16 : 하천점용허가 조속 처리토록 협의(16차)

- 공사가 시급하니 조속히 처리토록 당부

⇒ 국토관리청 의견 : 조속히 처리토록 검토하고 있음.

○ ‘15.02.17 : 하천점용허가 조속 처리토록 협의(17차)

⇒ 국토관리청(4차) : 보완자료 요구

▸2002년 하천기본계획시 수립한 여유고와 비교했을 때 어떤 수리적인 영향을 주는지 ? (※ 안춘천교가 NG가 나왔음)

▸신설역사가 재내지에 설치되는데 역사설치로 인해 제방에 미치는 영향은 ?

▸개봉1빗물펌프장 토출구가 신설역사 교각에 미치는 영향은 ?

○ ‘15.02.24 : 하천점용허가 보완자료 작성하여 방문 협의(18차)

- 보완자료 제출 및 공사의 시급성을 감안하여 조속히 하천점용허가 처리 당부

⇒ 국토교통부 의견 : 검토후 조속히 처리하겠음.

○ ‘15.02.25 : 하천점용허가 조속 처리토록 협의(19차)

- 보완자료를 다 제출하였으니 조속 처리토록 당부

⇒ 국토관리청(5차) 보완자료 요구

▸ 평시에 안양천에는 비가 안오고 목감천 상류에 폭우가 내려 개봉1빗물펌프장에서 최대 방류시 교각 및 및 가축도에 미치는 영향 검토하여 제출

○ ‘15.02.27 : 하천점용허가 조속 처리토록 협의(20차)

- 최종 보완자료 제출(별첨 #1) 및 설명

⇒ 국토관리청 의견 : 조속히 처리하겠음.

따로붙임 : 1. 개통1빗물펌프장 토출시 교각 및 가도 설치에 미치는 영향 검토서 1부.

2. 서울지방국토관리청 검토서 1부. 끝.