문서번호	총무과-1959
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	02/06 이상국
협 조
	주무관			임봉순

현장근로자 근무환경 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				36백만원

2015. 2

한강사업본부

총 무 과

현장근로자 근무환경 개선 계획

안내센터 현장근로자 대기실 등이 협소(미설치)하고 위생상태가 불량하여 근무환경을 저해하는 등의 문제점을 해소 하고자 휴게실(대기실) 설치 및 기존 대기실을 개선하고자 함                     - 시장요청사항 2013.11 -

■ 사업기간 : ‘15. 1월 ~ ‘15. 3월

■ 사업내용

❍ 현장근로자 휴게실(대기실)설치 및 개선 : 4개 안내센터

- 휴게실(대기실) 설치 : 청사내부 1 개소, 이동식 철골조(컨테이너) 5 개소

■ 개선대상

구 분	설치개소 수	설 치 위 치	설치시기	비고
여의도	2	청사 내 1, 외부 1	‘15 상반기	청사내부, 외부 컨테이너
양 화	2	청사 외부	〃	컨테이너
반 포	1	청사 외부	‘15 하반기	〃
강 서	1	청사 외부	〃	〃

※ 반포, 강서 : 둔치 표고가 낮아 홍수 시 침수 우려가 있어 장마철 이후 하반기 추진

■ 소요예산 : 35,750천원 (부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

- 여의도 : 13,970천원 (전기인입, 온수보일러, 난방공사 직접 시행)

- 양  화 : 21,780천원 (전기인입 직접시행)

■ 추진방법 : 수의계약

- 여의도 : 소규모 공사 (내부 칸막이 철거 및 설치 등)

- 양  화 : 제작·구매 설치 (컨테이너 제작 · 구매 설치)

■ 추진계획

❍ 2015. 1. : 상반기 현장조사 및 설치계획 수립

❍ 2015. 2. : 방침 · 발주 및 설치

❍ 2015. 3. : 준공 및 활용

※ 2015. 8 ~ 10 : 하반기 근무환경 개선 추진 및 완료

■ 2015 상반기 추진계획

❍ 여의도 안내센터

- 기존 임시 대기실 : 지하층 임시 대기실 2개 동 철거 (샌드위치 패널)

- 신규 설치 대기실 : 2개소

· 청사내부 : 2층 사무실 공간 분할 후 휴게실(대기실) 설치

· 청사외부 : 컨테이너 휴게실 1개동 설치(창고용 컨테이너 리모델링)

- 설치방법 : 소규모 공사 / 수의계약

❍ 양화 안내센터

- 신규 설치 대기실 : 2개동

· 청사외부 : 청사 주차장 후면 이동식 컨테이너 휴게실(대기실) 설치

※ 주차장 주변 기존 창고용 컨테이너 정비(재배치 및 기반시설(전기) 정비)

- 설치방법 : 컨테이너 제작 · 구매 설치 / 수의계약

■ 상반기 세부 추진계획

- 2015. 1. 12 ~ 1. 23 : 현장조사 및 설치계획 검토

- 2015. 1. 19 ~ 1. 31 : 설계도서 작성 및 가격조사

- 2015. 2.  2 ~ 2.  6 : 개선계획 수립 및 방침

- 2015. 2.  9 ~ 2. 11 : 계약 및 착수

- 2015. 2. 11 ~ 2. 28 : 공사 및 제작 추진

- 2015. 3. 2 : 준공 및 설치완료 (예정)

■ 행정사항

❍ 하천점용 협의 : 운영과 이동식 컨테이너 휴게실 하천점용허가 협의

❍ 기반시설 공급 : 전기 및 난방시설 (본부 기간제 근로자 직접 시행)

❍ 설치부지 정비 : 안내센터별 자체 시행

별첨 : 휴게실 설치 부지 현황 1부.

별첨

휴게실 설치 부지 현황

❍ 여의도 안내센터

위치도(안내센터 옆)	설치장소(청사 상류측)

❍ 양화 안내센터

위치도(안내센터 옆)	설치장소(청사 하류측)